문서번호	전시과-6289
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	09/16 이정규
협조

-서울시립과학관 2020년 신규 체험전시물 제작 설치-

보고회 개최 결과보고(3회)

2020. 9.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관 2020년 신규 체험전시물 제작 설치 -

보고회 개최 결과보고(3회)

우리과학관내에 양질의 전시콘텐츠 확충과 융·복합형 전시물 개발을 위하여 추진 중인 신규 체험전시물을 제작·설치하기 위해 계약상대자와 설계보고회를 개최하여 그 결과를 보고드림

□ 추 진 근 거

○「2020년 신규 체험전시물」제작설치 추진계획(전시과-4222, `20.06.23.)

○ 계약체결 통보[서울시립과학관 2020년 신규 체험전시물 제작·설치 계약]

(재무과-41164, `20.08.07.)

□ 3차 보고회

○ 일    시 : 2020. 9. 10.(목) 10:00~12:00

○ 장    소 : 서울시립과학관 2층 열린방

○ 참 석 자 : 총 7명

- 과  학  관 : 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관

- ㈜전시과학 : 김희건 이사 외 4명

○ 주요보고 및 협의내용(세부내용 : 붙임. 3차 회의록 참조)

- 이동 과학체험버스 설치 전시물 8종 선정 완료, 기획·설계 보완 및 협의

•(인트로)시간탐험대원 출동! : 문작동 형태 변경, 힌트 제공방식 변경

•나눠진 빛을 모아라 : 광원장치 연출 변경

•보이지 않는 빛을 찾아라 : 변경 없음

•거울암호를 해석하라 : 외장 연출 변경, 환경(음향)효과 추가

•진짜 색을 찾아라 : 버스 점검가능한 형태(점검구노출)로 변경

•폭주하는 파이프를 찾아라 : 전시연출 소품 추가

•숨어 있는 비밀번호를 찾아라 : 스마트 유리 활용

•그림자의 모양을 맞춰라 : 하우징변경(편광디스플레이 매립)

•타임머신의 연료를 공급하자 : 체험 난이도 조절

- 상설전시물 보완 3종 기획·설계 보완 및 협의

•G전시실 : 길위에서 사라져가는 생명들(로드킬), 지진에 잘 버티는 구조를 만들어봐요

•B전시실 : 삐릭! 삐릭!뇌파로 조종하는 드론

- 9월 4째주 중에 설계 최종보고 및 설계확정, 설계도서 제출

- 현재 개별 전시물에 대한 전시물명칭은 가안으로 진행하고, 설명 패널 내용과 디자인 작업 시 최종 확정

□ 향 후 계 획

○ 설계 승인 및 전시물 제작 착수             : `20.09.29

○ 전시물 및 설명패널 등 제작 설치 완료      : `20.11.20.

- 전시물 현장 설치 시 전기·통신 설비 사용 : 총무과 협조

○ 전시물 시운전 및 “내가 만드는 과학관” 운영 : `20.11.21.~11.29.

○ 전시물 보완 및 과업준공                   : `20.11.30~12.4.

○ 준공검사                                  : `20.12.5~12.10.

○ 대금지급                                  : `20.12.10.限

붙임 : 회의록(3차) 1부.  끝.