문서번호	박물관과-10202
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		한식문화공간조성추진반장	박물관과장
남광연		이병두	09/16 이성은
협조

『삼청각 별채 리모델링공사』

설비분야 공사 발주계획 보고

2020. 9.

문화본부

(박물관과)

『삼청각 별채 리모델링공사』

설비분야 공사 발주계획 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『삼청각 별채 리모델링공사』의 설비분야 공사 및 관급자재 발주계획에 대하여 검토하여 보고함

1		공사개요

□ 사 업 명 : 삼청각 리모델링 사업

□ 위    치 : 성북구 대사관로 3 외3필지

□ 규    모 : 6개동, 지하2/지상2층, 연면적 4,399㎡

□ 용    도 : 문화및집회시설

□ 공사내용 : 별채 5개동(연면적 1,003㎡) 기계‧전기‧통신‧소방 공사

- 기    계: 시스템에어컨(E.H.P) 설치공사

- 전    기: 전력간선, 전등･전열설비 등

- 통    신: 통합배선설비, A/V(구내방송장치)설비, 비상방송설비 등

- 소    방: 자동화재탐지설비, 유도등설비 등

□ 소요예산: ************************************

□ 공사기간: 2020.10. ~ 2021.02.(5개월)

□ 조감도 및 위치도

【 시설 위치도 】	【 조감도 】

2		추진경위

□	’16.4.22.	:	삼청각 운영활성화 기본계획 수립(시장방침 제110호)
□	’19.10.	:	삼청각 리모델링 설계용역 착수
□	’20.8.21.	:	주계약자 공동도급 공종분리 검증회의 및 설계완료 보고
□	’20.8.24.	:	실시설계 도서 접수(건축, 기계)
□	’20.9.3.	:	삼청각 리모델링 공사발주 방침수립(박물관과-9728)
□	’20.9.15.	:	실시설계 도서 접수(전기,통신,소방)

3		공사발주 계획

□ 소요예산: *********                             (단위: 천원)

구 분	총 공 사 비			비 고
	도 급 비	관 급 비	총 계
총계	***********	*************	*************
기계	***********	************	******	*******
전기	*************	************	*******
통신	***************	************	*******
소방(전기)	***************	*	******

※ 기계 도급공사는 건축공사에 포함(주계약자 공동도급)하여 기발주

□ 발주방법: 전기, 통신, 소방공사 분리발주

□ 입찰방법: 제한경쟁입찰(지역제한)

□ 낙찰자 결정: 시설공사 적격심사 세부기준(행정안전부 예규)에 의함

□ 현장설명: 미실시

-『지방계약법 시행령』제15조 제3항의 단서 규정에 의거 생략함.

□ 예산과목: 문화본부 박물관과, 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, 삼청각 리모델링, 시설비및부대비, 시설비

□ 입찰 참가자격 및 제한

구 분	전 기	통 신	소 방
입찰자격 (면허)	-전기공사업법에 의한 전기공사업 등록 업체	-정보통신공사업법에 의한 정보통신공사업 등록 업체	-소방시설공사업법에 의한 전문 소방시설공사업 등록 업체 또는 일반소방시설공사업 전기분야를 등록한 업체
참가제한	입찰참가일 전날부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점이 서울특별시에 소재한 업체

4		관급자재 구매계획

□ 관련근거: 조달사업에 관한 법률 제5조의2 제①항

조달사업에 관한 법률 시행령 제9조의3 제①항 2호

□ 구매품목: *********                              (단위: 천원)

분 야	품 명	구분	소요예산	계약방법
기 계	시스템에어컨(EHP)	관급자설치	******	*******
전 기	분전반	도급자설치	******	*******
	LED 조명등		******	*******
통 신	A/V설비, 전관방송설비	관급자설치	******	*******

**********************************************************************************

****************************************************************************

********************************************************

5		향후계획

□ `20.09.    : 전기, 통신, 소방공사 발주

□ `20.10.    : 공사 착공 및 관급자재 구매시행

□ `21.02.    : 공사 준공.  끝.