문서번호	시설과-2893
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
노해민	조민형	박종수	09/16 박미애
협 조
	공원운영팀장		이재이
	주무관		박기홍

천호공원 근로자대기실 정비공사 시행 계획

2020. 9.

동부공원녹지사업소

(시설과)

천호공원 근로자대기실 정비공사 시행계획

천호공원 내 현장근로자 대기실의 협소 및 노후로 근무여건이 열악하여 근로자대기실 설치 및 주변시설 정비로 쾌적한 근로환경을 제공코자함

□ 공원현황

❍ 공 원 명 : 천호공원(강동구 올림픽로 702)

❍ 개    원 : 1998. 6. 20.

❍ 관리면적 : 26,696㎡

❍ 주요시설 : 연못(음악분수), 야외무대, 배드민턴장, 농구대, 족구장 등

❍ 근로자현황 : 총 37명

			남	여	비고
1	환경정비	공무직	4	3
		기간제	2	1	3~11월 근무
2	시설경비	공무직	8	-	교대근무
		기간제	1	-	3~11월 근무
3	공공근로		10	1
4	사회복무요원		7	-
	합 계		32	5

□ 사업개요

❍ 건    명 : 천호공원 근로자대기실 정비 공사

❍ 사업기간 : 2020. 9. ~ 12.

❍ 사업내용

- 근로자대기실 3m X 6m 1동, 창고 3m X 6m 1동 설치

※ 공용건축물 협의(가설건축물 축조신고 → 강동구)

- 바닥 포장 공사, 주변 울타리 설치 등 주변 부대공사

❍ 소요예산 : ****************************************

- 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 공원유지관리및이용활성화, 시공원 유지관리 및 보수정비, 시설비

❍ 현황사진

노후 근로자대기실 외부	노후 근로자대기실 내부

□ 시행계획

❍ 근로자대기실(컨테이너) 구매

- 계약방법 : 조달청 3자 단가 구매 설치

- 납품기한 : 납품요구일로부터 30일

**********************

❍ 부대공사

- 계약방법 : 수의계약

· 관련근거

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조 제1항 제2호 가목

- 공사기간 : 착수일로부터 40일

- 계약자격 : 여성기업지원에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 여성기업으로 건설산업기본법에 의거 조경시설물설치공사업으로 등록한 업체

❍ 공공건축가 자문

- 장    소 : 천호공원 사업대상지

- 자문위원 : 공공건축가 *************

- 자문내용 : 근로자대기실와 창고 배치 방법, 대기실 내부 가구 배치, 외부 디자인선정, 마감재료 등

- 자문료지급 : 1시간당 100,000원(※ 인재개발원 자문수당 지급기준 준용)

❍ 공원조성계획(변경) 결정

- 도시공원위원회 심의 등 절차(경미한 변경)

- 관련근거

· 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 16조의 2 제3항(공원조성계획의 결정)

· 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제 13조 제2호

· 공원 내 가설건축물 설치 시 유의사항 안내(2019.10.15.(공원조성과-12821))

※ 가설건축물은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행령 제 13조 제2호」에 따라 이동 및 설치

가 쉬운 33제곱미터 이하의 시설인 경우 공원조성계획의 경미한 변경으로 처리 가능

- 시설율

구 분	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	시설율(%)	검토 내용
천호공원	26,696.8	9,801.6	36.71	가설건축물 설치 후 법정 시설율(40%) 만족

□ 추진일정

❍ 2020. 9.         : 공원조성계획변경(경미한 변경)

❍ 2020. 9. ~ 10.  : 자체 설계 및 설계 심사

❍ 2020. 10.         : 공사 발주

❍ 2020. 10. ~ 11. : 공사 시행 및 준공

□ 행정사항

❍ 예산 재배정 요청(→市 공원녹지정책과)

❍ 자체 설계심사(사업소 시설과)

❍ 공사계약 의뢰(사업소 공원운영과).  끝.