＂작은 참여, 큰 변화, 서울민주주의위원회＂
		서울민주주의위원회
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	계약기간 변경(연장) 의뢰(광진구 구의2동 마을활력소 조성공사 설계 및 정밀안전진단 등 실시 용역)

1. 지역공동체담당관-9051(2020. 9. 14.)호 관련입니다.

2. 광진구 구의2동 마을활력소 조성공사 설계 용역 및 광진구 구의2동 마을활력소 조성공사 정밀안전진단 등 실시 용역과 관련하여 아래와 같이 계약기간 변경(연장)을 의뢰하오니 처리하여주시기 바랍니다.

가. 광진구 구의2동 마을활력소 조성공사 설계 용역

*****************************

*************************************

**********

***********************************************************************************

- 귀책사유 : 해당사항 없음

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 코로나19로 사전절차인 공감워크숍 기간이 연장됨에 따른 기간 연장

나. 광진구 구의2동 마을활력소 조성공사 정밀안전진단 등 실시 용역

***************************

************************************

**********

*********************************************************************************

- 귀책사유 : 해당사항 없음

- 지체상금 : 미부과

- 연기사유 : 코로나19로 사전절차인 공감워크숍 기간이 연장됨에 따른 기간 연장

붙임  1. 방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 각 1부.

3. 합의각서 각 1부.  끝.

							서울민주주의위원회
주무관							박성균			공동체공간조성팀장					김준민					지역공동체담당관					09/14 최순옥
협조자
시행			지역공동체담당관-9067									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 2층 (태평로1가)															/
전화		02-2133-6343						/전송			02-2133-0827					/	kyun1123@seoul.go.kr												/	부분공개(7)