“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	공사변경계약 체결 보고 및 통보(와우산배수지 신축이음부 보수공사)

급수운영과-14988(2020. 9. 9.)호 공사 계약 변경 의뢰에 따라 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고(통보) 합니다.

1. 계 약 건 명 : 와우산배수지 신축이음부 보수공사(담당 : 김일)

2. 계 약 상 대 : 대한공영㈜ (대표 : 박영진)

3. 변경계약일 : 2020. 9. 9.

4. 변 경 내 역

구분	계약 변경 정보		증감/비고
	당초	변경
총부기계약금액	173,523,820원	173,523,820원	변동없음
공 사 기 간	2020. 9. 11. 까지	2020. 12. 11. 까지	91일 연장

5. 변 경 사 유 : 와우산배수지 1, 2호지의 여름철 물 사용량 증가로 물 사용이 적은 시기에 맞춘 공사 기간으로 변경

6. 보증서 등 추가 수납

구분	변경 내용	비고
계약보증서	보증기간 연장(2020. 12. 11.까지)	보증서 제출
선금급보증서 (선금 : 66,440,000원)	보증기간 연장(2021. 2. 9.까지)	보증서 제출
	기간 연장에 따른 이자 추가 보증(629,460원)

붙임  1. 공사 변경 계약서 1부.

2. 계약 보증서(연장) 1부.

3. 선금급 보증서 각 1부.

4. 계약 체결 서류 각 1부.

5. 변경계약 의뢰 공문 1부. 끝.

	서부수도사업소장
주무관	구자람		행정관리팀장	강정환		행정지원과장	박달경		서부수도사업소장	09/14 이종주
협조자
시행	행정지원과-18184	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	0231463551	/전송	0231463578	/	spirit24@seoul.go.kr	/	부분공개(7)