		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	녹번·역촌119안전센터 환경개선 건축공사 변경계약 체결 계획 보고

1.관련근거

가. 소방행정과-5967(2020.6.11.)호 “녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 발주”

나. 소방행정과-6017(2020.6.12.)호 “녹번·역촌119안전센터 환경개선사업 건축 공사 계약의뢰”

다. 서울시 재무과-38738(2020.7.22.)호 “계약 체결 알림(녹번, 역촌 119안전센터 환경개선사업 건축 공사)”

라. 소방행정과-7717(2020.7.28.)호 “녹번·역촌119안전센터 환경개선 공사 계약 체결 보고”

마. 소방행정과-9420(2020.9.11.)호 “녹번·역촌119안전센터 환경개선공사 낙찰차액 사용 설계 변경 시행 보고”

2. 녹번·역촌119안전센터 환경개선 건축공사 설계 변경으로 계약상대자와 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 녹번·역촌119안전센터 환경개선사업 건축공사

나. 계약업체 : 마로건설주식회사

다. 계약금액 : *******************************

라. 계약기간 : 2020. 7. 31. ~ 9. 27.

마. 변경사항

계약금액	당 초	금262,012,720원(이억육천이백일만이천칠백이십원)
	변경후	금290,970,410원(이억구천구십칠만사백일십원)
	증 액	금28,957,690원(이천팔백구십오만칠천육백구십원)

바. 예산과목 : 소방관서 시설물 유지보수 / 시설비(401-01)

붙임 1. 변경계약 방침서 1부.

2. 시방서 및 도면 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 설계변경내역서 1부.  끝.

담당자							차영진			장비회계팀장					임지혜					소방행정과장					이대우				소방서장						09/15 代이대우
협조자
시행			소방행정과-9510									(						)		접수											(						)
우	03311					서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동)은평소방서 3층 소방행정과															/			http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		02-6981-6021						/전송			02-359-7019					/													/	부분공개(5)