문서번호	시설보수과-4909
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
이승환		김준섭	09/15 변봉섭
협 조
	주무관			신동헌
	주무관			고흥일
	주무관			이철형

「상도터널 보수보강공사」실시설계용역

추진계획 보고

2020. 9.

남부도로사업소

시설보수과

「상도터널 보수보강공사」실시설계용역 추진계획 보고

우리사업소에서 시행예정인『상도터널 보수보강공사』와 관련하여 공사 효율성 제고를 위하여 실시설계용역을 시행하고자 추진계획을 보고 드림.

□ 추진 배경

○ 상도터널내 고드름에 의한 교통사고 발생 언론보도(채널A,국민일보)관련, 터널내부 고드름과 교통사고간 직접 관련성이 없음(CCTV 확인)으로 파악 되었으나,

○ 상도터널에 대하여 정밀안전진단을 시행하고 누수 등 지적된 부분에 대한 보수보강이 필요 함.

□ 대상시설물 현황

시설물명	종별	위 치	준 공	규 모	구 조	등급
상도터널	2종	동작구 상도동 516 ~ 본동 136	1981	B=9.2m, L=568m (2열)	AR	B

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 상도터널 보수보강공사

○ 공사기간 : 2020. 12. ~ 2021. 09.

○ 공사개요

- 라이닝 누수보수 210m, 바닥판 누수보수 4.9㎡, 수발공 정비 28개소, 신축이음부 정비 2,310m,  표면보수 4,184㎡ 등

○ 총사업비 : ***********

- **********************************

□ 실시설계용역 필요성

○ 2020년 상도터널 정밀안전진단 결과, 상도터널 배수체계 정비에 적합한 보수·보강 방안(교통처리계획 포함 등) 수립을 위하여 실시설계가 필요 함.

□ 조치 계획

○ 상도터널 배수체계 정비 등 보수보강을 위한 실시설계용역을 시행후 보수보강공사를 추진하여 예산 집행에 만전을 기하고자 함.

□ 행정 사항

○ 상도터널 보수보강공사 실시설계용역 시행(수의계약 추진)

- 용 역 명 : 상도터널 보수보강공사 실시설계 용역

- 용역기간 : 착수일로부터 30일

- 용 역 비 : **************

· 예산과목 : 재해 및 재난 예방, 재난 예방 및 복구, 재난관리기금   재난계정, 상도터널 보수공사, 시설비

- 주요과업내용

· 현장답사, 관련자료 수집 및 준비(정밀안전진단 보고서 등)

· 누수 등 손상부 보수·보강 설계, 상세도면, 수량, 소요예산 산출

· 보수보강 공사를 위한 지침과 보강공법별 표준도 및 종합보고서 작성

· 공사중 안전사고 예방을 위한 교통처리계획 수립 등

- 수의계약 사유 : 추정가격 2천만원이하로써「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호에 의거 수의계약코자 함.

· 수의계약 참가자격 :『엔지니어링산업진흥법』제21조에 의거 건설부문 토목구조 분야의 엔지니어링 사업자 신고를 필한자로 주된 영업소재지가 서울특별시에 있는 업체

□ 향후 계획

○ 20.09. : 실시설계 용역 업체 선정 및 계약

○ 20.09. ~ 10. : 실시설계 용역 시행 및 준공

○ 20.10. ~ 21.09 : 상도터널 보수·보강공사 발주 및 시행

붙임 : 1. 실시설계 과업내용서 1부.

2. 용역 설계내역서 1부.  끝.