문서번호	도시브랜드담당관-7833
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		브랜드관리팀장	도시브랜드담당관
정윤희		이훈상	09/15 김동경
협조

2020년도 서울브랜드 조형물 제작․설치 용역 계약 변경계획

2020. 9.

시민소통기획관

(도시브랜드담당관)

’20년 서울브랜드 조형물 제작·설치 용역 계약 변경계획

집중호우로 인하여 한강공원내 일부 유실·파손 된 서울브랜드 조형물의 신속한 복구를 위해 ’20년 서울브랜드 조형물 제작·설치 용역계약을 변경하고자 함

1		사업개요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ’20년 서울브랜드 조형물 제작·설치 용역

○ 용역기간 : ’20.9.8~12.31

○ 용역업체 : *******************

○ 과업내용 : 서울브랜드 조형물 2개소 제작·설치(김포공항,노들섬)

- 김포공항 : 16m × 2.75m × 1.85m 내외

- 노 들 섬 : 25m × 2.2m × 1.2m 내외

- 조형물 설치비, 조명시설, 철거(김포공항 설치장소 기둥) 등 포함

○ ****************

2		계약변경 계획

□ 변경 사유

○ ’20.8월 집중호우로 인하여 여의도 및 뚝섬 한강공원내 설치한 서울브랜드 조형물이 유실되고 파손되어 긴급 복구 필요

○ 특히 여의도 한강공원내 2016년도에 설치된 서울브랜드 조형물은 25m에 달하는 대형 크기로 시민들이 즐겨 찾는 곳으로 인지도가 높아 신속한 복구 필요

여의도 한강공원	뚝섬 한강공원
◦설치규모 : 25m×2.2m×1.2m ◦현 황 : ‘U’자 유실, 조명 파손 (점 2개 공원 내 발견)	◦설치규모 : 18m×2.36m×1.3m ◦현 황 : ‘U’자 유실, 조명 파손 (나머지 모든 글자 공원 내 발견)

□ 과업추가 및 계약금액 변경

○ 과업변경 : (현재)2식 신규 설치 →
(변경)2식 신규 설치 + 2식 복구 설치

- 추가과업 : 기존 조형물 2개소 회수·철거, 'U'자 신규 제작 및 재도장 후 재설치, 바닥 콘크리트 기초작업(뚝섬) 등

**********************************************

*************************************************

**********

********************************************

	추 진 근 거
‣ 지방계약법 시행령 제74조(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정) - ① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다 - ⑨ 제조ㆍ용역 등의 계약에서 계약금액을 조정하는 경우에는 제1항부터 제8항까지의 규정을 준용할 수 있다

○ 변경 산출내역

- 비목별 내역

(단위:원)

구 분	당초내역	변경내역
***	**********	**********
***	**********	**********
****	**********	**********
****************	**********	**********
**********	***********	***********

- 공종별 내역

(단위:원)

구 분	당초내역	변경내역
************	**********	**********
***********	**********	**********
****************	*	**********
****************	**********	**********
*********	***********	***********

※ *****************************************************************************

3		향후일정

□ 계약 변경 의뢰(재무과)	: ’20.09.16

□ 조형물 복구 및 재설치	: ~’20.09월

□ 조형물 신규 제작·설치	: ~’20.12월

붙임 : 1. 합의각서 1부.

2. 변경 산출내역서 1부. 끝.