문서번호	수상안전과-3939
결재일자	2020. 9. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		수상안전과장	운영부장
최윤정		윤재한	09/15 송영민
협조	총무과장		이상이
	기획예산과장		문영일

한강아라호 기관 수리 용역

준공 기한 연기 검토 보고

2020. 9.

한강사업본부

(수상안전과)

한강아라호 기관수리 용역 - 준공기한 연기 검토보고

8~9월 장마와 태풍으로 난지 검사소의 상가일정이 연기됨에 따라 한강아라호의 검사 및 시운전도 연기되어 준공기한을 연장하여 선박검사에 만전을 기하고자 함

용역현황

○ 용 역 명 : 한강아라호 기관(주기관, 발전기) 수리 용역

○ ******************************

○ ************************************

○ 계 약 일 : 2020.08.03.

○ 준공기한 : 2020.08.03. ~ 2020.10.01.(60일간)

검사개요

○ 검사대상 : 한강아라호

- 688톤, LBD 55.5m x 12m x 2.5m, 2010.10.20.건조

○ 검사기관 : (사)한국선급(KR), 서울지부

○ 검 사 일 : 2020.11.18.까지

○ 관련법령 : 선박안전법 제8조(정기검사)

□ 검토내용

○ 준공기한 연기사유

- 2020.8.2.부터 시작된 장마와 태풍으로 난지 검사소의 보수 공사가

지연됨에 따라 상가 일정 및 선박 검사, 시운전 일정이 연기되어 준공기한        연장이 필요함

- 선박검사를 위해 상가대 사용하고자 예정되었던 난지 검사소의 침수와

쓰레기 등으로 상가대 보수 공사가 지연되어 상가 일정이 9월3일에서

10월5일로 연기 됨

▸ 팔당댐 방류량 및 태풍 정보 : 붙임 참조

난지 검사소 침수 모습	난지 검사소 쓰레기 모습

○ 연기기간

- 당초 : 2020.08.03. ~ 2020.10.01.

- 변경 : 2020.08.03. ~ 2020.10.30.

□ 검토의견

○ 장마와 태풍으로 인한 선박 검사소의 침수와 쓰레기 처리 등으로

보수공사 일정이 연기되어 검사 일정도 늦어져서 준공기한을 연장하여

진행하는 것이 타당함

붙임  1. 계약서, 준공기한 연기의뢰서, 합의각서 각1부

2. 태풍 및 팔당댐 방류량 정보 1부.  끝.