코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	천호대교 확장 타당성조사 용역 과업중지 해제 알림

1. 도로계획과-1292호(2020.01.28.)와 관련입니다.

2. 위 호로 일시 중지된 “천호대교 확장 타당성조사 용역”에 대하여 아래와 같이 과업중지 해제를 알려드립니다.

가. 용 역 명 : 천호대교 확장 타당성조사

나. 계약금액 : 금193,810,000원

다. 계약일자 : 2019.02.14.

라. 과업중지기간 : 2020.01.28. ~ 2020.09.20.(237일)

바. 최종과업기간 : 2019.02.18. ~ 2020.12.

사. 해제사유 : 천호사거리 중앙버스전용차로 개통 및 천호지하차도 평면화 완료에 따른 과업중지 사유 해소.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재무과장,(주)동일기술공사
전문관	이승헌		간선도로계획팀장	김경호		도로계획과장	09/16 안대희
협조자
시행	도로계획과-12795	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로계획과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8077	/전송	02-2133-0763	/	sh0123@seoul.go.kr	/	대시민공개