문서번호	설비부-14009
결재일자	2020. 9. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
나경운	여인웅	09/16 이달영

『탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

탈취기 및 폴리머용해설비

변경계약(정산) 검토보고

2020. 09.

『탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사』

탈취기 및 폴리머용해설비 변경계약(정산) 검토보고

「탄천물재생센터 총인처리시설 기계설비공사」 관급자재 중 공사성이 포함된 물품인 탈취기 및 폴리머용해설비 대하여 미사용한 보험료 및 간접비를 정산하여 변경계약하고자 검토보고 드림

1		공사개요

□  공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

□  위    치 : 강남구 개포로 625 일원(탄천물재생센터 내)

□  규    모 : 하수처리시설 Q=900,000㎥/일

- 총인 450,000㎥/일+ 비총인 450,000㎥/일= 혼합방류(T-P 0.5㎎/L 이하)

□  공사기간 : 총차 2017. 12. 4.~2020. 12. 31.

□ 공사금액 : 총차 1,837백만원

□  도 급 사 : ㈜이수에이치앤씨 외 2개사

□ 감 리 사 : ㈜선진엔지니어링

2		관련근거

□ 탈취기 구매설치 변경계약 요청 검토 보고(탄천하감 2020-282호(2020. 9. 16.)

□ 폴리머용해장치 제조구매설치 변경계약 요청 검토 보고(탄천하감 2020-283호(2020. 9. 16.)

3		검토내용

□  계약현황

품명	계약금액	납품기한	계약자
탈취기	************	***********	********
폴리머용해설비	***********	************	******

□  변경사유

□ 탈취기 및 폴리머용해설비는 물품 및 공사가 혼재된 관급자재로 사후 정산항목인 산재보험, 고용보험 등이 원가계산서에 포함되어 있어 납품처리 전 미사용 보험료에 대하여 정산하고자 함

□  변경금액

품명	변경전	변경후	증감
탈취기	************	************	***********
폴리머용해설비	***********	***********	*********

□  정산내역

□ 탈취기

구분	변경전	변경후	증감
산재보험료	********	**	*********
고용보험료	*******	**	********
건강보험료	********	**	*********
연금보험료	********	**	*********
노인장기요양보험료	*******	**	********
퇴직공제부금	********	**	*********

□ 폴리머용해설비

구분	변경전	변경후	증감
건강보험료	********	**	*********
연금보험료	********	**	*********
노인장기요양보험료	*******	**	********
산엄안전보건관리비	********	**	*********

□  감리자의견

□ 탈취기 및 폴리머용해설비 미사용 보험료 및 관련 간접비 정산함에 따라 계약금액을 변경함이 타당하다고 판담 됨

4		보고자 의견

□ 건설사업관리단의 의견이 타당하므로 총무부로 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  감리단 공문(검토보고서) 각1부.  끝.