투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	관급자재 변경계약 요청

우리과에서 추진 중인 『광나루 잠원수영장 노후 상수관로 교체공사』와 관련하여 공사에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 변경계약(납품기간)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 변경내용

납품요구번호	품 목	규 격	수 량	변경내용(납품기간)		비 고
				당 초	변 경
12-20-1 -76768-00	콘크리트 블록	T80mm 투수블록	16,729	2020. 11. 21.	2021.5.31.

끝.

	공원시설과장
주무관	이병철		공원시설과장	09/16 최연호
협조자
시행	공원시설과-3601	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 공원시설과 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0842	/전송		/		/	대시민공개