투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰[개봉철도고가 성능개선 전기공사(총차1회, 1차1회)

1. 설비부-13910(2020. 9. 15.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 「개봉철도고가 성능개선 전기공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차1회, 1차1회) 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 개봉철도고가 성능개선 전기공사

나. 계 약 자: *************

다. 계약금액 변경내역

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
***	**********	**********	*************
***	**********	**********	*************

※ 공사기간: 변경없음

라. 변경사유: 실정보고 승인사항 반영 및 보험료 사후정산

첨부  1. 설계변경 검토 보고 1부.

2. 설계변경 내역서 총차 및 1차 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 총차 및 1차 각 1부.

4. 합의각서 총차 및 1차 각 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김문호		환경설비과장	김오열		설비부장	09/16 이달영
협조자
시행	설비부-13937	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스빌딩 15층 (무교동)	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/		/	부분공개(5)