문서번호	총무과-27489
결재일자	2020. 9. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	09/17 김혁
협 조

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1회) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

행정국

(총무과)

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」

설계변경(1회) 검토보고

「2020년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)」와 관련하여  계약물량의 변경(증·감) 및 신규공종 발생 등으로 설계변경 후 준공(기성)처리 하고자 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

(설계 변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준

- 13장 공사계약 일반조건 제6절(공사설계의 변경), 제7절(계약금액의 조정)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2020년도 청사 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020.01.01.~ 12.31.

○ 계약금액 : *****************************

○ 계 약 자 : ****************

○ 공사내용 : 청사 전기시설물 유지보수공사

□ 설계변경 현황

○ 변경 사유

- 당초 공사량을 추정 물량을 토대로 발주하였으나, 계약 후 공사 시행시         공사량의 증감과 산출내역서에 없는 품목·비목 추가 발생

- 이에, 기성대가의 지급을 위하여 공사량 증감 및 신규 품목·비목 추가 등을        반영한 설계변경 필요

○ 주요 변경 내역

공종(규격)	단위	변경 전		변경 후		증감
		수량	금액(천원)	수량	금액(천원)	수량	금액(천원)
강제전선관설치(28㎜)	m	50	1,612	100	3,225	증 50	증 1,613
금속가요전선관(22㎜)	m	20	269	400	5,399	증380	증 5,130
난연케이블(FGV6㎟)	m	1	3	35	85	증 34	증 82
등기구철거설치(LED35w)	개	50	1,990	32	1,273	감 8	감 717
배선용차단기(225AF,3P)	개	0	0	12	3,714	증 12	증 3,714
LED등기구(10w)	개	0	0	20	1,335	증 20	증 1,335

○ 계약금액 변경

구분	변경 전	변경 후	증감	비고
공사비	250,960,520	250,960,520	-	금액변동 없음

○ 적용단가 협의

- 관련근거 : 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 공사계약 일반조건 제7절         (계약금액의 조정)

- 합의 결과:  물량 감소 및 증가는 계약단가 적용, 신규비목은 설계변경 당시를          기준으로 산정한 단가에 낙찰율을 곱한 금액으로 적용

□ 조치계획

○ 설계변경에 따른 변경계약 의뢰(재무과)

○ 변경계약 완료 후 준공(기성)

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 합의각서 2부.  끝.