문서번호	시설관리과-22757
결재일자	2020. 9. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		동부수도사업소장
서영인	김대용	송병욱		09/17 代손광언
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「2020년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(1차) 심의위원회 개최결과 보고

2020. 9.

동부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

「2020년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)」

설계변경(1차) 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행중인『2020년 묵1동 외 7개동 상수도공사』   설계변경(1차)과 관련 심의위원회를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

공사현황

가. 공 사 명 : 2020년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요

- 당초 : D=13~400mm, L=1,231m

- 변경 : D=13~400mm, L=1,287m(증 56m)

다. 계약기간 : 2020. 5. 25 ~ 2021. 6. 30

라. 계약상대자 : *****************

마. 설계변경 금액 : ******************

2. 관련근거

가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조 및 동법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

① 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 공사계약에서 설계 변경으로 인하여 공사량의 증감이 발생하였을 때에는 법 제22조제1항에 따라 해당 계약금액을 조정한다.

나. 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준, 행정자치부 예규 제67호(2016.10.04.)

- 제13장 공사계약 일반조건 제6절 공사설계의 변경 및 제7절 계약금액의 조정

3. 설계변경 현황

가. 설계변경 사유

- 현장여건 변화에 따른 시공물량 증감 및 신규공종, 신규 사급자재 발생

나. 설계변경 세부내역

- 시공물량 증,감 현황

· 부단수천공분기점분기(300×연결관25~30㎜) 외 9개공종

- 신규공종 및 신규 사급자재 발생

· 신규공종 : 스테인레스관 부설공(20㎜) 외 10개 공종

· 신규자재 : 부단수할정자관(100/80mm) 외 3종

- 주요공종 세부 변경내역 : 따로붙임(설계변경 내역서 참조)

4. 계약금액 조정결과

(단위:원)

구분	당초	변경	증·감	비고
******	***********	***********	*	****
****	***********	***********	*
*****	**********	**********	*

5. 심의위원회 개최현황 및 결과

가. 개최일시 : 2020. 9. 17(목) 11:00

나. 개최장소 : 시설관리과(3층)

다. 참석위원 : 시설관리과장 외 4인

라. 심의내용 : 신규공종 단가산출 및 시공물량 증감 등의 적정성 검토

마. 심의결과 : 적정함

6. 조치의견

가. 설계변경 심의위원회 심의결과에 따라 설계변경을 시행하고, 행정지원과로 변경계약 의뢰하고자 함

붙임: 1) 설계변경 심의 의결서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.  끝.