투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사)

우리 과에서 시행중인 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공사명: 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사

2. 도급자: 에스디원건설㈜ 대표 백정주

3. 도급액: 금327,383,000원

4. 준공기한 연기

- 준공기한: (당초) 2020. 9. 30. → (변경) 2020. 10. 30.

- 연기사유: 유래없는 오랜 장마와 태풍, 한강공원 장기 침수와 수해복우에 따른 진입통제 등으로 절대공기 부족

- 지체상금: 미부과(귀책사유 없음)

붙임  1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 관련보고서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	최재훈		시설관리과장	09/18 代임무환
협조자
시행	시설관리과-3501	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0692	/전송	02-3780-0744	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)