- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회)시행(2020년 도로굴착복구공사(연간단가))

우리 부서에서 시행 중인「2020년 도로굴착복구공사(연간단가)」에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2020년 도로굴착복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2020. 3. 20. ∼ 2020. 12. 31.

다. 계약금액 : 695,066,400원

라. 계 약 자 : 풍요산업개발(주) 대표 손수길

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
총공사비	1,200,998,400	1,200,998,400		-
도 급 비	695,066,400	695,066,400		-
관 급 비	314,797,370	314,797,370		-
이 전 비	191,134,630	191,134,630		-

바. 설계변경사유 : 잦은 굴착으로 인한 노후도로 정비 및 관리청 복구물량 변동에 따른 시공물량 증·감

사. 예산과목 : 도로굴착복구, 도로굴착복구공사, 시설비및부대비, 시설비(도로굴착복구기금)

붙 임 :  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부. 끝.

주무관							장은경			도로굴착팀장					황인수					도로시설과장					代김경수				생활도시친화국장						09/18 정택근
협조자				주무관						한희주					계약팀장							변혜경					재무과장							박종필
시행			도로시설과-9626									(	2020.9.18					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6123						/전송			02-3396-8839					/	nomood@junggu.seoul.kr												/	대시민공개