문서번호	도로보수과-8526
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
이상구		이화신	09/21 고영준
협 조

2020년 도로굴착복구공사(연간단가)-북부 작업지시(6차) 시행계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020.  09. 21

북부도로사업소

(도로보수과)

2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

작업지시(6차) 시행계획 보고

우리사업소에서 시행중인 「2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부」와 관련 관내 유관기관에서 특별시도 도로관리청 굴착복구의뢰에 따라 제6차 작업 시행계획을 보고 드림

▢ 사업개요

∘ 공 사 명 : 2020년 포장도로 굴착복구공사(연간단가)-북부

∘ 공사기간 : 2020. 3. 25. ~ 12. 31.

∘ 공사개요 : 굴착복구 62a, 표층확폭복구 60a, 절삭후덧씌우기 660a

∘ 총공사비 : ************************************************************************

∘ 도 급 자 : ************

▢ 5차 작업계획 내용

∘ 작업기간 : 2020. 09. 21. ~ 11. 30.(굴착복구 허가기간 까지)

∘ 작업위치 : 종로구 창신동 496 ~ 창신동 526-1 외 10개소

∘ 정비규모 : 폭 1.2~2.0, 연장 1,130m

∘ 정비물량 : 약 50.21a, 11건

- 굴착복구 16.32a, 차로단위복구 33.89a

∘ 도로굴착복구 6차 작업 세부내역

연번	복구의뢰 신청기관	위 치	복구요청 및 지시물량						작업조건		비고 (허가번호)
			공 종	폭 (m)	연장 (m)		면적 (A)		주	야
1	종로구 안전치수과	종로구 창신동 496 ~ 창신동 526-1	굴착복구공사	1.95	133		259.4			◯	종로구-2020-하수-00070
			차로단위복구	3.0	133		399
2	종로구 안전치수과	종로수 창신동323-4~창신동 323-4	굴착복구공사	2.0	23		46			◯	종로구-2020-하수-00068
			차로단위복구	3.0	23		69
3	종로구 안전치수과	종로구 창신동330-3~창신동 326-2	굴착복구공사	1.6		37.5		60		◯	종로구-2020-하수-00069
			차로단위복구	3.0		37.5		112.5
4	종로구 안전치수과	종로구 창신동 198 ~ 창신동 266-1	굴착복구공사	1.5		187		280.5		◯	종로구-2020-하수-00065
			차로단위복구	3.0		187		561
5	종로구 안전치수과	종로구 종로6가 70 ~ 창신동 693-3	굴착복구공사	2.0		109		218		◯	종로구-2020-하수-00064
			차로단위복구	3.0		109		327
6	북부수도사업소 급수운영과	노원구 월계동 313 앞, 월계동285-1앞	굴착복구공사	1.2		175		210		◯	노원구-2020-상수-00122
			차로단위복구	3.0		175		525
7	한국전력공사 노원도봉지사	노원구 중계동 391 앞	굴착복구공사	1.2		40		48		◯	노원구-2020-전기-00056
			확폭복구	3.0		40		120
8	북부수도사업소 시설관리과	강북구 수유동372-2 ~ 수유동 370-4	굴착복구공사	1.2		55		66		◯	강북구-2020-상수-00183
			차로단위복구	3.0		55		165
9	중부수도사업소 시설관리과	성북구 하월곡동 90-1372 ~ 종암동 3-1288 외 1	굴착복구공사	1.2		30		36		◯	성북구-2020-상수-00320
			확폭복구	3.0		30		90
10	SK텔레콤(주)	종로구 창성동 140-1 ~ 91-1	굴착복구공사	1.2		240		288		◯	종로구-2020-통신-00029
			차도단위복구	3.0		240		720
11	SK텔레콤(주)	종로구 통의동 111-1 ~ 73-1	굴착복구공사	1.2		100		120		◯	종로구-2020-통신-00030
			차로단위복구	3.0		100		300

∘ 예산집행현황

(단위: 천원)

구분	계약금액	기 작업지시 금액	금회 작업지시 금액	잔 액	비고
도급비	1,937,992	511,835	285,390	1,140,767
관급비	1,437,890	120,410	63,810	1,253,670
이전비	526,000	17,040	8,350	500,610	폐기물
합계	3,901,882	649,285	357,550	2,895,047

▢ 조치계획

∘ 상기와 같이 도로굴착복구공사(연간단가) 책임건설사업관리단(제2권역,(주)경동엔지니어링) 및 시공사에게 작업지시 통보 및 시행.

∘ 정비물량은 개략 작업물량으로 건설사업관리단 작업완료 보고서에 따라 정산처리

붙임  1. 작업지시서(위치도포함) 1부.

2. 작업지시내역서 1부.  끝.