투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	세외수입(지연배상금)감액 결정결의 등록

1. 건축부-15866(2020.9.17)호 및 10607(2020.6.24.)호와 관련입니다.

2. G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사(1차) 지연배상금에 대하여 고지서 발급을 하였으나, 법원결정에 따른 지체일수(하도급사 현의기간) 산입여부와 지연배상금 산정여부 관련하여 지연배상금 정정요청이 있어 감액결정결의 하고자 합니다.

** 감액 후 세입세출외 현금(채권압류금)으로 보관.

붙임 : 1. 결의서 1부.

2. 결의내역서 1부.

3. 관련공무 및 재산정 관련 문서 ZIP파일 1부. 끝.

주무관							윤종란			재무예산과장					홍은미					총무부장					09/21 강희은
협조자
시행			총무부-17188									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-2378						/전송			02-3708-2365					/	juno6535@seoul.go.kr												/	부분공개(7)