문서번호	시설관리과-22903
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장	동부수도사업소장
박윤선	박종일	송병욱	09/21 이재호
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다.”

2020년 제기동 외 5개동 상수도공사

설계변경(1회) 추진 계획 보고

2020. 9.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2020년 제기동 외 5개동 상수도공사

설계변경(1회) 추진 계획 보고

「2020년 제기동 외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)」와 관련 신규 공종 및 물량 증·감에 대한 설계변경 추진 계획을 보고 드림.

▢ 공사개요

○ 공 사 명: 2020년 제기동외 5개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 도 급 자:**************

○ 공사기간: 2020. 4. 27.~ 2021. 4. 30.

○ 공사규모

- 당초: D= 13~400㎜, L= 2,034m

- 변경: D= 13~400㎜, L= 1,855m

○ 공사금액 변경내역

구 분	금 액(원)		증·감(원)	비 고
	당 초	변 경
도 급 비	918,658,640	918,658,640	-	물량증감 및 신규공종 발생

▢ 변경사유 및 세부내용

○ 설계변경 사유

- 토공, 부설공, 구조물공 등 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

- 제경비 변경 등

○ 설계변경 세부내역

- 변경 공사개요

구 분	단위	물량내역		증·감	비 고
		당 초	변 경
D= 13~50㎜	m	1,418	1,266	감 152	신규공종 발생 수량변경
D= 80~400㎜	m	616	589	감 27	신규공종 발생 수량변경

- 세부내용 및 금액 증·감 현황: [야간] 공종 다소 물량 증가

구 분	공종	명 칭	증·감(원)	비고
신규 공종	32	고압블록포장(띠복구) T=6~8㎝ 등	증 4,078,707
물량 증가	37	인력 터파기(협소, 지장물) 견질토사, 야간 등	증 6,844,236
물량 감소	37	보호통 설치공 20-30㎜ 등	감 10,482,196
기 타	1식	제경비 등	감 440,747

▢ 심의 (검토)내용

○ 물량 변동 및 단가 적용 등의 적정성 여부

○ 신규공종 적정성 여부

○ 관련법규 및 규정 적법성 여부

○ 설계변경 세부내용 및 사유 등 타당성 여부

▢ 설계변경 심의 위원회 개최

○ 개최일자: 2020. 9. 21.(월)

○ 개최장소: 시설관리과 사무실(3층)

○ 참석위원: 시설관리과장 등 5인

▢ 향후계획

○ 설계변경 심의위원회 개최결과에 따라 설계변경 시행하고 행정지원과로 변경계약 의뢰

붙임 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.