문서번호	조경과-12413
결재일자	2020. 9. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	조경협력팀장	조경과장
유승아	김상주	전결 09/21 문길동

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(강북구)

2020. 9.

푸른도시국

[조  경  과]

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업

사업계획 변경 요청에 따른 검토보고(강북구)

2020년 공동체정원 조성 주민제안사업 지원 관련 보조금 단체의 예산 집행계획 변경에 대하여 자치구로부터 변경 승인 요청이 있어 검토보고 드림

□ 지원사업 개요

❍ 사 업 명 : 어울림 공동체정원(강북 마을 텃밭)

❍ 지원단체 : 강북 가드너스

❍ 대 상 지 : 강북구 수유동 599, 수유동 594-1

❍ 사업내용 : 관내 유휴지 활용한 정원 조성 등

❍ 총사업비 : 18,000천원(보조금 16,000, 자부담 2,000)

❍ 협약 자치구 : 강북구(공원녹지과)

	2020년 공동체정원 조성 주민제안사업(보조금분야)
❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 11. ❍ 선정단체 : 24개 자치구 49개 공동체 ❍ 총사업비 : 700백만원(자치단체경상보조금) ❍ 사업내용 : 생활 속 꽃과 나무를 심고 가꾸는 공동체에게 보조금 지원

□ 변경사항

❍ 변경내용 : 보조비(세)목간 예산 집행계획변경

❍ 변경사유

- 사업 추진과정 중 절감된 기반조성재료비, 사업진행비 예산을 식물재료비로 변경집행하고자 함

❍ 세부 변경사항

(단위 :천원)

비 목	세부항목	보조금		자부담		비고
		변경 전	변경 후	변경 전	변경 후
계		16,000	16,000	2,000	2,000
재 료 비	식물재료비	8,480	11,228
	기반조성재료비	2,660	1,782	440	440
사업진행비	식 비 등	4,860	2,990	660	660
활동비	간담회비			900	900

❍ 자치구 검토결과

- 공동체정원 조성 보조금 집행지침 상 변경가능한 사항으로 변경승인코자 함

□ 검토결과

❍ 사업추진 중 절감된 기반조성재료비, 사업진행비를 식물재료비로 변경집행하는 사항으로 사업의 원활한 추진을 위하여 변경승인함

□ 향후계획

❍ 검토결과 및 변경승인 통보(시 → 강북구)

붙임 : 자치구 공문 1부.  끝.