투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(도로계획과장)
(경유)
제목	예산조정(통계목변경) 요청(월드컵대교 건설공사)

1. 토목부-18130(‘20. 9. 18.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『월드컵대교 건설공사』의 12차공사 준공기한 연기('20.8→'20.12, 4개월)에 따른 부족한 건설사업관리용역비 확보를 위해 아래와 같이 예산조정 통계목변경(시설비→감리비)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 통계목변경 요청내역

- 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교 건설, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

- *************************************

(단위 : 원)

***		********			**
		***	***	***
***		**************	**************	*
***	*	**************	**************	*************
	**	**************	**************	*************
	**	*************	*************	*
	**	**************	**************	*
***	*	*************	*************	*************
	**	*************	*************	*************
	**	**********	**********	*

나. 변경사유

- 월드컵대교의 12차공사 준공기한 연기에 따른 건설관리용역 과업기간 연장에 대한 투입분 반영

- 물가변동에 따른 계약금액 조정분 반영

붙임  통계목 변경 검토보고서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조재근		토목총괄과장	진재섭		토목부장	09/21 김용제
협조자	주무관	박운용
시행	토목부-18277	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2547	/전송	02-3708-2599	/		/	부분공개(5)