투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)	공사감독3처
제목	공사구간 신설 공원등 규격 변경 요청 (뚝섬·망원한강공원 자연형호안 복원사업)

1. 귀 공단의 무궁한 번영을 기원합니다.

2. 우리본부에서 시행중인「뚝섬·망원한강공원 자연(형)호안 복원사업 전기공사」와 관련하여 뚝섬한강공원 공원등 신설 3개소 규격을 아래와 같이 변경 요청 드리오니 변경사항은 추후 설계변경시 반영하시기 바랍니다.

구분	내용	비고
공원등	- 신설 공원등 3개소 규격 변경 10m POLE → 7m POLE	해당 공사 구간 주변 공원등 규격 측정 결과 7m로 조도 및 미관상 문제 발생 재기

3. 아울러 작업에는 공정 및 품질관리에 철저를 기하시고, 특히 자전거 라이딩 안전사고가 발생하지 않도록 작업차량 이동시 신호수를 전·후면에 배치하여 공원등 노출 임시선로 설치에 따른 안전사고에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	현병철		공원시설과장	09/22 최연호
협조자
시행	공원시설과-3711	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) 한강사업본부 공원시설과	/
전화	02-3780-0861	/전송	02-3780-0745	/	qudcjf8441@seoul.go.kr	/	부분공개(7)