문서번호	지역돌봄복지과-17611
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	복지시설팀장	지역돌봄복지과장
박슬기	김은숙	09/22 하영태

- 서울YWCA봉천종합사회복지관 저탕조 교체 공사 -

2020년 확정 기능보강사업 변경 검토보고

2020. 9.

복 지 정 책 실

(지역돌봄복지과)

- 서울YWCA봉천종합사회복지관 저탕조 교체 공사 -

2020년 확정 기능보강사업 변경 검토보고

민원해소 및 이용자 안전을 위해 공사를 추가하고자 변경 요청한 건으로 본 공사와 연계된 사업의 효율성 증대를 위해 사업변경은 타당함

□ 요청사항

◯ 2020년 종합사회복지관 기능보강사업 계획 변경 신청

(관악구 복지정책과-32493, 2020.9.3.)

◯ 시 설 명 : 서울YWCA봉천종합사회복지관

◯ 사 업 명 : 기관실 저탕조 교체 공사

◯ 요청내용 :  ‘수영장 타일 메지 보수 공사’ 추가를 위한 사업계획 변경

□ 사업변경 신청사항

◯ 저탕조 교체 공사(당초 확정)를 통해 시설 장비의 내구성을 강화하고 수영장 타일 메지 보수를 추가 공사로 실내 환경을 개선하여 수영장의 기능을 향상시키고자 함

- 수영장 타일 메지의 전반적인 오염 및 파손으로 인해 민원과 안전사고 우려가 지속 제기됨에 따라

- 저탕조 교체 설계·공사비***************************** 변동에 따른 차액**********으로 ‘수영장 타일 메지 보수 공사’를 집행하고자 함

※ 본 공사와 추가공사 동시 진행을 통해 수영장 내 물 교체 비용 중복 방지 효과도 있음

<현장자료>

□ 검토결과 - ‘승인’

◯ 승인내역 – ‘수영장 타일 메지 보수 공사’ 추가를 위한 사업계획 변경

◯ 검토의견 (서울시 복지재단 타당성 검토 반영)

- 수영장 바닥 및 수조 내부 현황 검토 결과 전반적으로 오염되어 있어 기존 줄눈을 철거하고 재시공하는 등 추가 사업에 대한 필요성은 인정되며

- 저탕조 교체 공사를 통해 수영장으로 공급되는 온수의 효과적 공급과 수영장 내 타일 메지 보수를 추가로 동시 진행함으로써 수영장 내 물 교체 비용 중복 방지 및 안전한 이용 환경을 구축할 수 있으므로 사업계획 변경이 당초 사업목적인 저탕조 교체공사와 연계성이 있으며

- 예산 변경 없이 기 교부된 사업비 내에서 추가 진행되므로 사업집행의 효율성과 이용자들의 안전을 위해 ‘수영장 타일 메지 보수 공사’ 추가를 승인

□ 기능보강사업 변경 대비표

◯ 변경 대비표

(단위 : 천원)

사업명	기 존			변 경			증 감
	예 산		내 용	예 산		내 용
저탕조 교체 공사	시비	******	저탕조 교체 공사	시비	******	저탕조 교체 공사, 수영장 타일 메지 보수 공사	********
	구비	******		구비	******
	자부담	*****		자부담	*****
	총액	******		총액	******

❍ 변경 세부내역

(단위 : 천원)

사업명	공 사 내 역	예 산 내 역				비고
		계	시 비	구 비	자부담
저탕조 교체 공사	저탕조 교체 공사(설계용역 포함)	******	******	******	*****
	수영장 타일 메지 보수 공사	******	*****	*****	*****	추가사업
	합계	******	******	******	*****

붙임 : 1. 사업변경 승인요청 공문 1부.

2. 기능보강 사업변경을 위한 서류 일체 각 1부.