문서번호	설비부-14402
결재일자	2020. 9. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정인석		오삼록	09/22 이달영
협조

『시립청소년 음악창작센터 건립』

관급자재(지열시스템) 실정보고 사항 검토 보고

2020. 9.

도시기반시설본부

(설비부)

『시립청소년 음악창작센터 건립』

관급자재(지열시스템) 실정보고 사항 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『시립청소년 음악창작센터 건립』사업과 관련하여 지열시스템(관급자재) 천공위치 변경사항에 대한 검토 보고 드림.

Ⅰ		계약현황

○ 건    명 : 시립청소년 음악창작센터 지열시스템 제작설치

****************************************

******************************************

******************************************

************************

Ⅱ		관련근거

○ 지열시스템 제작설치 실정보고 승인요청 [시립CM 제2020-106호,('20.09.21.)]

Ⅲ		검토내용

○ 변경사유

- *****************************************************************************

○ 변경내용

변경사항	당 초	변 경
****	*	*

○ 변경 금액 : 증감 없음

○ 건설사업관리단 검토의견

- *************************************************************************************

Ⅳ		보고자의견

○ 건설사업관리기술인의 실정보고 내용이 적정하다고 판단되어 실정보고 내용을 승인하고자 함

Ⅴ		향후일정

○ '20. 10.~12. : 천공 및 트렌치 배관시공

○ '21. 10. : 지열장비설치

○ '22. 02. : 지열시스템 준공

붙임 : 건설사업관리단 공문 1부.  끝.