- 중구민을 위한 도시 -
		서울특별시 중구
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(제1회) 시행[2020년 보도유지보수공사(연간단가)]

우리 부서에서 시행 중인 『2020년 보도유지보수공사(연간단가)』에 대한 설계변경(제1회)을 아래와 같이 시행코자 합니다.

1. 공 사 명 : 2020년 보도유지보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2020.03.11.~ 2020.12.20.

3. 도 급 자 : 갑오건설주식회사 대표 박희태

4. 설계변경 내역                                                       (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
총 공 사 비	1,009,105,220	1,859,100,000	증 849,994,780
도 급 비	696,105,220	1,433,100,000	증 736,994,780
관 급 비	257,000,000	341,000,000	증 84,000,000
이 전 비	56,000,000	85,000,000	증 29,000,000

5. 설계변경 사유

- 추가공사에 따른 시공물량 증·감

6. 예산과목(도급비)

예산과목	예산액	비 고
(일반회계) 도시기반시설확충, 도로유지관리, 보도유지보수공사, 시설비	113,190,000	구비
(일반회계) 도시기반시설확충, 도로유지관리, 평탄성 불량보도 및 보도턱 집중정비, 시설비	136,800,000	구비
(일반회계) 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선, 보도정비(포괄비), 시설비	269,115,220	시비
(일반회계) 보행정책과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 보행환경 개선, 횡단보도 진출입로 장애인 안전시설 정비, 시설비	150,000,000	시비
(도시개발특별회계) 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 역사문화자원 관리, 정동 역사재생사업, 시설비	250,000,000	시비
(도시개발특별회계) 도시재생과, 공공재생계획 수립, 공공개발 및 공공공간 확충(도시개발), 서울로2단계 연결길 조성사업, 시설비	513,994,780	시비

붙  임 : 1. 설계변경 내역서(1회) 1부.

2. 검증확인서 1부.

3. 관련보고서 1부.

4. 일상감사 및 계약심사 결과 1부.  끝.

주무관							박성범			보도관리팀장					박흥규					도로시설과장					김규엽				생활도시친화국장						09/22 정택근
협조자				주무관						한희주					계약팀장							변혜경					재무과장							박종필
시행			도로시설과-9770									(	2020.9.22					)		접수											(						)
우	04558					서울특별시 중구 창경궁로 17 (예관동)															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6092						/전송			02-3396-8839					/	xinema79@junggu.seoul.kr												/	부분공개(5 7)