문서번호	치수과-15187
결재일자	2020.9.22.
공개여부	비공개
방침번호

주무관		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
김한성		김경원		민병기		09/22 代정헌욱
협조
	재무과장		이경생
	계약팀장		이은술

★ ◉

「금호역 주변 등 3개소 하수관로 개량공사」

설계변경(정산) 검토보고

2020. 9.

성 동 구

(치수과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 □ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 □ ( ) 무 ☑
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 □ 환경영향 □ 안 전 ☑ 유지비용 ☑ 바른 공공언어 □
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	서울시	:		유 ☑ ( 시비 재배정사업 ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「금호역 주변 등 3개소 하수관로 개량공사」

설계변경(정산) 검토 보고

우리구에서 시행중인 『금호역 주변 등 3개소 하수관로 개량공사』의 시공 물량 증·감 등에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 사 업 명: 금호역 주변 등 3개소 하수관로 개량공사

▢ 사업기간: 2020. 4. 16. ~ 2020. 10. 12.

▢ 공사개요: 하수관로 개량 D300mm~D800mm, L=313m 등

▢ 도 급 자: 유등건설㈜ 대표 이혜경

▢ 도 급 비: 325,223,570원(시비)

Ⅱ		설계변경 사유

▢ 주요 설계변경 내용

○ 공사현장실정보고 반영[치수과-7225(2020.5.15.)]

- 굴착보호판 설치 등

○ 하수관로 추가 정비에 따른 물량증가[치수과-7952(2020.5.28.)]

- 하수관로 D450mm, L=85m 추가 개량공사

○ 기타 공사현장 여건을 반영한 시공물량 증·감 [치수과-10002(2020.7.1.)]

▢ 공사금액 변경	(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	447,903,570	475,040,000	증) 27,136,430
도 급 비	325,223,570	384,602,000	증) 59,378,430
관 급 비	59,710,000	66,529,000	증) 6,819,000
이 전 비	62,970,000	23,909,000	감) 39,061,000

▢ 주요 물량 증․감 내역

공 종		단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 ․ 감
토 공	터파기	㎥	728	1,054	+	326
	되메우기 및 다짐	㎥	436	664	+	228
	아스팔트 포장 절단	m	786	884	+	98
	무근 구조물 헐기	㎥	122	218	+	96
배수공	하수관 개량	m	313	430	+	117
	맨홀설치 및 개량	개	12	18	+	6
	빗물받이 개량	개	28	33	+	5
포장공	절삭 후 아스팔트 덧씌우기	a	11	16	+	5

Ⅲ		조 치 계 획

▢ 상기 내용과 같이 시공방법 및 물량 증·감 등에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경(정산)하고 준공처리코자 함.

※ 증액되는 공사비는 이전비 및 낙찰차액(52백만원) 범위내 활용

붙 임: 1. 변경설계서 및 제비율 검증확인서 각 1부.

2. 계약심사 의견서 1부.