문서번호	치수과-15164
결재일자	2020.9.22.
공개여부	부분공개
방침번호

지방시설주사		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
문철		김경원		민병기		09/22 代정헌욱
협조

★ ◉

「군자 2구역 소블럭 정비 시범사업」

설계변경(정산) 검토보고

안전건설교통국

(치수과)

「군자 2구역 소블럭 정비 시범사업」

설계변경(정산) 검토 보고

「군자 2구역 소블럭 정비 시범사업」에 대하여 건설사업관리

감리원으로부터 설계변경 보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

※ 관련근거: 건양(성동)제20-29호(2020.9.17.)

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 군자 2구역 소블럭 정비 시범사업

○ 기    간: 2020. 4. 17. ~ 10. 31.

○ 규    모

- 하수관 정비 및 복합단면 설치 D450~D600mm, L=463m

- 친환경 빗물받이 설치  N=67개소

○ 계약금액: 535,103천원

○ 계 약 자: ㈜고덕종합건설   대표 나기선

Ⅱ		설계변경(정산) 검토 보고

□ 주요 설계변경 내용

○ 공사현장 실정보고 반영: 인접구간 추가 정비

[관련근거: 치수과-10367호(‘20.7.7.)]

- 당초: D450~D600, L=463m

- 변경: D450~D600, L=557m(증 94m)

※ 추가 정비 구간(D600mm, L=147m)중 일부 구간 도로포장 등으로 정비 불가(D600mm, L=53m)

○ 간이복합단면 설치수량 감소

- 당초: D450~D600mm, L=463m

- 변경: D450~D600mm, L=152m

※ 사유: 가정하수도 간섭 등으로 설치 불가

○ 친환경 빗물받이 설치수량 감소: 30개소→11개소

※ 사유: 하수관 심도와 친환경빗물받이 연결관 심도 불일치

○ 제경비 및 기타 물량증감 반영

- 건강, 연금, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금은 실납부 금액으로

정산 확인

- 건설기계대여금 지급보증서 발급수수료는 지급보험증권 확인

○ 유지보수용 자재 구매

- 악취차단장치(200개), 빗물받이(1호)뚜껑(200개), 빗물받이(2호)뚜껑(100개), 맨홀뚜껑(50조)

□ 물량증감 및 신규비목 단가: 협의단가 적용

○ 물량 증감: 계약 단가 적용

○ 신규 비목: 낙찰율(87.815%) 적용

□ 공사비 증·감 내역

구 분	공 사 금 액(단위 : 원)			비 고
	당 초	변 경	증․감
총공사비	918,303,260	730,063,000	감)188,240,260
도 급 비	535,103,260	562,903,000	증) 27,799,740
관 급 비	87,400,000	110,530,000	증) 23,130,000
이 전 비	295,800,000	56,630,000	감)239,170,000

□ 주요 물량 증·감 내역

공 종	단위	수 량			비 고
		당초	변경	증·감
하수관 정비(D450~D600)	m	463	557	증) 94
복합관 설치(D450~D600)	m	463	152	감)311
맨홀 정비	개소	18	23	증) 5
빗물받이 설치	개소	67	67	-

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기 내용과 같이 시공 물량 증·감에 대하여 설계변경(정산) 시행하고 준공코자 함.

붙임: 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 도면 및 수량산출서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 실정보고 공문 1부.

5. 설계변경 요청공문 1부(대용량파일-별도).  끝.