문서번호	건축부-15973
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축관리과장	건축부장
서경식		조승제	09/18 이창구
협조	여성정책기획팀장		김경원
	주무관		김민희

『스페이스 살림 조성공사(총차,4차)』

계약변경(공기연장) 검토보고

2020. 9.

도시기반시설본부

(건 축 부)

『스페이스 살림 조성공사(총차,4차)』

계약변경(공기연장) 검토보고

장마로 인한 공사일정 지연으로  ‘대방역 출구 철거 공사’를 위한 공사기간 확보가 필요하다는 건설사업관리자의 실정보고가 있어, 이에 대한 검토 보고임

******************************************************

□ 사업개요

○ 위    치 : 서울시 동작구 대방동 340-4번지 외 3필지

○ 규    모 : 지하2층, 지상7층, 연면적 17,957㎡

○ 공사기간 : 2017.12.26. ~ 2020.09.25.

○ 시 공 자 : (주)호반건설 외 2개사

○ 감 리 자 : (주)희림종합건축사사무소 외 1개사

○ 건축공사비(도급액) : *********  / 공 정 율 : 97%

□ 추진경위

○ `15. 4. 7. : 스페이스 살림 조성계획(시장방침)

○ `16. 4. 4. : 국제설계공모 공고       /  `16. 6.30. : 당선작 발표

○ `16. 7.28.~`17.11.30. : 설계 용역 /  `17.10.31. : 공용건축물협의 완료

○ `17.12.26. : 착공                    /  `18. 9.30. : 공사 준공(1차)

○ `19. 7.15. : 공사 준공(2차)         /  `20. 7.31. : 공사 준공(3차)

□ 실정보고 내용

○ 보고 현황

-「대방역 출입구 철거공사 기간 연장에 따른 준공기한 변경요청 적정성 검토보고」

HTSC 2009-38호(2020. 9. 17.)

○ 관련 근거

- 공사계약 일반조건 제32조(불가항력)

- 산업안전보건법 제70조(건설공사의 기간의 연장)

○ 보고 사유

- 대방역 2,3번 출구 철거공사: 장마(54일)로 인한 공사 일정 지연

□ 계약변경 내용 및 사유

○ 공사 기간 변경

구 분	변 경 전	변 경 후	증 감
총 차	**********************************	**********************************	*****
4 차	**********************************	**********************************	*****

○ 변경 사유 및 경위

- ******************************************

∵ ***************************************************************************************

- *************************************************

⇨ ***************************************************************************************************

○ 귀책 사유 : *********

○ 지체상금 부과 : ***

○ 공 사 비 : *****

□ 건설사업관리자 검토의견

○ ******************************************************************************

○ ******************************************************************

□ 처리의견

○ ***********************************************************************************************************

붙 임: 건설사업관리단 실정보고 검토의견서 1부.  끝.