문서번호	영동대로복합개발추진단-6848
결재일자	2020. 9. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	사업총괄과장	영동대로복합개발추진단장	도시철도국장
김선만	김형건	이승석	09/18 김진팔
협 조
	재무예산과장		홍은미

『영동대로 지하공간 복합개발사업』

지하안전영향평가 용역 준공기한 연기 검토보고

2020. 9.

도시기반시설본부

(영동대로복합개발추진단)

『영동대로 지하공간 복합개발사업』관련

지하안전영향평가 용역 준공기한 연기 검토보고

「영동대로 지하공간 복합개발사업」의 지하안전영향평가용역 추진 중 기관협의 등을 위한 과업기간이 추가 필요해 준공기한을 연기하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 :「영동대로 지하공간 복합개발사업」관련 지하안전영향평가 용역

○ 용 역 비 : 금100,319,000원

○ 용역기간 : '18.5.10. ∼ '20.9.30.

○ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트

□ 추진현황

○ '18. 4. 4.	: 지하안전영향평가 용역 시행계획 수립

○ '18. 5.10.	: 지하안전영향평가 용역 착수

○ '19. 5. 3.	: 지하안전영향평가 용역 1차 준공연기('19.5.9.→'19.12.30.)

○ '20. 7. 9.	: 지하안전영향평가서 제출(서울시→국토부)

○ '20. 7.16.  : 지하안전영향평가서 제출 회신(국토부→서울시)

○ '20. 8.~9. : 국토교통부(서울지방국토관리청) 방문 협의(2회-8.26/9.11)

○ '20. 9.14.	: 지하안전영향평가서 보완 제출(서울시→국토부)

□ 검토내용

○ 계약상대자 의견

- 지하안전영향평가서 접수 이후 소요되는 국토교통부 협의 후 평가서 보완기간(약3.0개월 소요)이 추가 소요되므로 용역준공기한 연장 필요

○ 검토의견

- 지하안전영향평가서 승인 기관인 국토교통부(서울국토청) 방문협의 결과 본 사업 규모 등을 감안시, 2개 외부기관(LH,한국시설안전공단) 및 관련 학회, 전문가 자문 등 중복 검토 계획으로,

- 각 기관별 협의, 자문의견을 반영한 평가서 작성 등에 따른 과업기간 소요될 것으로 예상되어 준공기한 연장이 타당하다고 판단됨.

※ 지하안전영향평가서 검토 및 통보 기간(지하안전법시행령제17조제4항)

(접수후 30일, 연장시 50일 - 보완기간 및 토·공휴일 제외)

□ 조치계획

○ 준공기한 연기 시행

- 당초 : ‘18.5.10~’20. 9.30

- 변경 : ‘18.5.10~’20.12.30 (3개월 연장)

○ 계약기간 연기사유

- 연기사유 : 국토교통부 협의 및 보완사항 반영을 위한 과업기간 부족

- 귀책소재 : 서울특별시

- 지체상금 : 미부과

붙임   1. 관련공문 1부.

2. 준공기한 연기 합의서 1부.  끝