문서번호	급수운영과-20121
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손현정	문병희	09/23 변재홍
협 조	주무관			강병국
	주무관			최선보
	주무관			강환희

『2020년 9월 2차』

단위사업별 공정보고회 개최 결과 보고

2020. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『2020년 9월 2차』

단위사업별 공정보고회 개최 결과 보고

우리사업소에서 발주하여 서울시설공단에서 감독하고 있는 단위사업에 대해 2020년 9월 2차 공정보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 현 황

○ 9월 2차 공정보고회 개최

- 일    시: 2020. 9. 18.(금) 10:30

- 장    소: 본관 3층 급수운영과

- 참석대상: 서울시설관리공단 팀장 및 감독, 시공사 현장대리인, 담당자

- 공정보고: 단위사업별 부진사유 및 문제점 논의 및 세부적인 향후 대책 보고

□ 현황 및 추진계획

○ 현황                                        (2020.9.18.기준)

주요 추진사업		공 사 명	구경 (㎜)	연장 (㎞)	실적 (㎞)	달성율 (%)	비고
상수도관 정비		계(3건)
	송배수관 정비 (2건)	홍익병원사거리~신목중학교앞 삼거리	600	1.1	0.3	27	부진
		목동배수지 입구~신목중학교삼거리외1개소	400 ~600	1.59	0.53	33	부진
	배급수관 정비 (1건)	고척동 320번지 외 8개소(’19년 이월)	150 ~300	2.76	1.2	42	부진

○ 추진 계획

1. 고척동 320번지외 8개소 배급수관 정비공사

- 도로관리청 협의결과 굴착불가 구간(1구간, 6구간)

‣ 관리청 굴착허가 재협의하여 최종 불가 통보시 감독기관인 공단과 계약업체간 협의를 통해 조치예정

‣ 본부와 협의 연차별 정비계획을 수립 공사시행 예정

- 시장상인들의 공사 추진 반대 구간(9구간)

‣ 상인들과 협의하여 연휴기간중 공사 추진방안을 합의하여 연휴기간등에 작업이 진행될수 있도록 공사추진

- 나머지 잔여 구간(2구간)

‣ 추진상 문제가 없으나 공사가 지연되고 있어 시설공단 및 공정계획을 수립하여 정상 추진 예정

2. 홍익병원사거리~신목중학교간 장기사용 송배수관 정비공사

- 1구간(D600㎜, L=230m): 10.26~11.8

‣ 추진상 문제가 없어 정상 추진 예정

- 2구간(D600㎜, L=170m): 10.19~10.25

‣ 추진상 문제가 없어 정상 추진 예정

- 3구간(D600㎜, L=360m): ~9.24까지 주간공사 시행으로 완료 예정

‣ 당초 야간에서 주간으로 관련기관(경찰서등)협의 후 공사시행

- 4구간(D600㎜, L=300m):  10.5~10.18

‣ 추석연휴 이후 예정

※ 야간작업으로 인한 소음 등으로 작업공정(야간→주간) 변경후 작업시행하고 기존 작업팀외 추가 팀 구성하여 추진 예정

3. 목동배수지~신목중학교삼거리외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

- 1구간(D600㎜, L=700m): ~10.10까지 정상 추진 완료예정

- 2구간(D400㎜, L=458m): 10.12~10.23

‣ 보도구간 작업공간 협소등 문제점이 돌출되어 보도구간의 허가사항을 구청

과 재협의를 통해 도로구간으로 굴착허가를 변경하여 추진

- 3구간(D400㎜, L=140m)

‣ 강서도로사업소에서 관리하는 간선도로임을 감안 당초 보도구간 허가를 도로

구간으로 변경 추진 및 협의 중에 있으며, 협의결과에 따라 추진 예정

○ 공정보고 사진

□ 향후 계획

○ 공정보고시 부각된 문제점과 대처 방안에 대해 차질없이 추진되도록 지시

○ 단위사업별 추진계획에 대한 세부적인 추진 현황과 공정표를 작성하여 향후

공정보고 전까지 사업소에 제출

○ 효율적인 공정관리와 공사추진을 위해 개최 예정인 공정 보고일을 추석이후로 연기하여 개최코자 하며, 상기 내용을 감독기관인 서울시설공단에 통보코자 함

- 당초: 9.28.(월) → 변경: 10.6.(화).   끝.