문서번호	설비부-14491
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	09/23 이달영
협 조
	주무관			나경운

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

설비분야 예비준공검사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 09.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

설비분야 예비준공검사 시행계획

『탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업』설비분야(기계,전기,통신) 예비준공검사를 아래와 같이 실시하여 사업 준공 및 인계ㆍ인수 준비에 만전을 기하고자 합니다.
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

건설공사 예비준공검사 시행방법 개선[기술심사담당관-10083(2018.06.28.)호]

기계공사 예비준공검사 수행계획보고[탄천하감 2020-293(2020.09.22.)호]

전기공사 예비준공검사 수행계획보고[탄천하감 2020-290(2020.09.22.)호]

통신공사 예비준공검사 수행계획보고[탄천하감 2020-291(2020.09.22.)호]

Ⅱ
		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 기계,전기,통신공사

공사위치 : 서울특별시 강남구 개포로 625번지 탄천물재생센터 내

공사규모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

계약현황

구 분	기계	전기	통신
계약업체	**********	***********	*******
계약금액	***********	***********	*********
계약기간	*********************	********************	********************

감 리 자 : ㈜선진엔지니어링종합건축사사무소 외 3개사

Ⅲ
		예비준공검사 계획

예비준공검사 일정

〇 일  시 : 2020. 09. 24.(목) 14:00 ~

〇 장  소 : 탄천물재생센터 공사 현장

예비준공검사 참여자

〇 점검자 : 도시기반시설본부 설비부 공업6 이창근, 공업7 나경운

〇 입회자 : 책임건설사업관리기술자, 분야별 현장대리인

주요 점검내용

〇 공사 내용 중 미비한 사항의 사전 보완

〇 공사 품질확보 및 하자 발생 방지를 위한 사전점검

〇 인계ㆍ인수 관련 사전 보완사항 점검

점검결과 조치계획

〇 예비준공검사 실시 결과 지적사항은 건설사업관리기술자에게 보완지시

〇 지적사항 보완 완료 후 책임건설사업관리기술자 확인 후 준공검사원 제출

Ⅳ
		향 후 계 획

2021. 04. : 공사 준공 및 시운전 완료

2021. 05. : 시설물 인계ㆍ인수

붙임 : 1. 설비분야(기계,전기,통신) 예비준공검사 수행계획 보고 각 1부.

2. 예비 준공검사 조서 1부.

3. 건설공사 예비준공검사 시행방법 개선 1부.   끝.