코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	관악구청장(복지정책과장)
(경유)
제목	2020년 확정 기능보강사업 변경요청 결과 통보(서울YWCA봉천)

1. 관악구 복지정책과-32493(2020.9.3.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 신청한 ’20년 종합사회복지관 확정 기능보강사업 변경요청 건에 대하여 아래와 같이 승인하오니, 결정 세부내용은 [붙임]을 참고하시어 향후 사업 절차 이행 등 사업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시설명 : 서울YWCA봉천종합사회복지관(관악구)

나. 사업명 : 기관실 저탕조 교체 공사

다. 변경내역

(단위 : 천원)

사업명	공 사 내 역	예 산 내 역				비고
		계	시 비	구 비	자부담
저탕조 교체 공사	저탕조 교체 공사(설계용역 포함)	******	******	******	*****
	수영장 타일 메지 보수 공사	******	*****	*****	*****	추가사업
	합계	******	******	******	*****

라. 검토결과 : ‘승인’

- 수영장 바닥 및 수조 내부 현황 검토 결과 전반적으로 오염되어 있어 기존 줄눈을 철거하고 재시공하는 등 추가 사업에 대한 필요성은 인정되며

- 저탕조 교체 공사를 통해 수영장으로 공급되는 온수의 효과적 공급과 수영장 내 타일 메지 보수를 추가로 동시 진행함으로써 수영장 내 물 교체 비용 중복 방지 및 안전한 이용 환경을 구축할 수 있으므로 사업계획 변경이 당초 사업목적인 저탕조 교체공사와 연계성이 있으며

- 예산 변경 없이 기 교부된 사업비 내에서 추가 진행되므로 사업집행의 효율성과 이용자들의 안전을 위해 ‘수영장 타일 메지 보수 공사’ 추가를 승인

붙임 : 2020년 확정 기능보강사업 변경 검토보고(서울YWCA봉천) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박슬기		복지시설팀장	김은숙		지역돌봄복지과장	09/23 하영태
협조자
시행	지역돌봄복지과-17648	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	02) 2133-7389	/전송	02) 2133-0719	/	psgg216@seoul.go.kr	/	부분공개(5)