문서번호	시설관리과-3613
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장	시설부장		한강사업본부장
최재훈	손창열	代양돈욱		09/24 신용목
협 조
	총무부장		기봉호
	총무과장		이상이
	기획예산과장		代이경춘

[잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사]

설계변경(1회) 시행보고

2020. 9.

한강사업본부

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

[잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사]

설계변경(1회) 시행보고

잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사와 관련하여 공종별 물량의 증감 및 신규공종 발생에 따른 설계변경을 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사

□ 규    모: 노후 상수관 정비(D100㎜, L=1.5㎞)

□ 기    간: 2020. 3. 20. ~ 2020. 10. 30.

□ 총공사비: 금644,583천원

******************************************

Ⅱ		설계변경 보고

□ 설계변경 사유

○ 공사 현안사항 실정보고 (시설관리과-1220호, -2241호)

- 안전사고 예방을 위한 야간공사 시행, 콘크리트포장층 깨기 발생

- 추가 공사비는 낙찰차액(55,417,000원) 및 이전비 활용

○ 공종별 물량 증감 및 신규 공종(콘크리트깨기 등 2종) 발생

○ 노후 포장도로 환경개선 민원사항 등 반영

□ 주요 물량변경 내역

공 종	단 위	당 초	변 경	증 감	비 고
콘크리트포장 깨기, 야간	㎥	-	432	증) 432	신규
관부설(D13㎜~D20㎜)	m	250	404	증) 154
밸브실 설치	개소	13	15	증) 2
아스팔트 절삭 후 포장	a	58	100	증) 42

□ 직접공사비 변경 내역

공 종	수량	단위	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)
토 공	1	식	76,603,416	132,603,512	증) 56,000,096
부 설 공	1	식	30,248,471	44,013,612	증) 13,765,141
구조물공	1	식	4,131,819	6,307,826	증) 2,176,007
포 장 공	1	식	42,955,290	59,289,356	증) 16,334,066
부 대 공	1	식	43,334,429	43,275,454	감) 58,975

□ 설계변경 금액

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
총공사비	644,583,000	700,000,000	증) 55,417,000
도급비	327,383,000	475,900,000	증) 148,517,000
관급자재비	127,960,000	163,100,000	증) 35,140,000
이전비	189,240,000	61,000,000	감) 128,240,000

□ 설계변경 자문위원회 심의결과: 원안가결

Ⅲ		조 치 계 획

□ 위와 같이 설계변경 시행하여 공사 추진에 만전을 기하고자 함

붙임 1. 변경설계서(1회) 1부.

2. 설계변경 자문위원회 심의결과 1부.

3. 관련 보고서 각1부.  끝.