투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고건 승인(고덕교 슬라브 구배조정 외 2건))

1.업무지시현장 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사(장기1차) 임원개발주식회사, 고덕

교확장 및 고덕보도교 설치공사(장기1차) 주식회사 경동엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2020-09-23 20:09:41

3.지 시 내 용

가.창덕궁감2020-248호, 249호, 250호(2020.09.21.)와 관련임.

나.“고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사”와 관련하여 고덕교 슬라브 구배조정 외 2건의 실정보고건에 대하여 감리단 검토의견과 같이 승인 통보하오니 시공에 따른 안전 및 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다.아울러 공사비 증감이 50백 만원이상인 실정보고 건(고덕교 슬라브 구배조정, 교량신축이음장치 설치)에 대해서는 우리 본부의 설계변경 자문회의 결과를 반영하여 계약금액 조정 등 후속절차를 이행하시기 바랍니다.

붙임 : 검토보고서 각1부.  끝.

주무관							이성열			광역도로과장					09/24 代전병철
협조자
시행			토목부-18590									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2559						/전송			02-3708-2599					/	san730@seoul.go.kr												/	부분공개(5)