문서번호	설비부-14523
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
정찬교		오삼록	09/24 이달영
협조

『창경궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

설계변경(총차1회,1차1회,2차1회)검토보고

2020. 09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『창경궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사』

설계변경(총차1회,1차1회,2차1회)검토보고

『창경궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사 』건설사업 관리단으로부터 기 실정보고 승인된 사항과 설계변경 소위원회 심의 의견을 반영한 설계 변경 서류가 접수되어 검토 보고함.

1		공사개요

□  공 사 명 : 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□  위    치 : 종로구 돈화문로(종로3가~창덕궁 돈화문) 일대

□  규    모 : 가로등 89본, 보안등 31등, 신호등 교차로 4개소

□  감리사/시공사 : ㈜경동엔지니어링/(주)유니시스엔지니어링

□ 공사금액 및 기간

차수	계약금액	공사기간
1차	*************	*******************
2차	*************	*******************
총차	***************	*******************

□ 공사 위치도

2		관련근거

□ 창덕궁감 20-226호(`20.8.19): 설계변경 소위원회 심의자료 제출

□ 설비부-13815호(`20.9.15): 설계변경 심의 결과(조건부 가결)

□ 경동 제20-2340호(20.9.22): 설계변경 도서 제출

3		설계변경 내용

□ 주요 설계변경 내용

공종	주요 변경사항	직접비 (단위:천원)
돈화문로	************* ***************************** ********************************* ****************** ******************** *************************** ******************** ********************	********
돈화문로10길,11길	***************** ********************** ***********************	********
서순라길	********************* *********************** **************************************	*******
피맛길	************************ *************	*******
낙원상가하부	************************** *********************************************** **************************** ******************** ******************** ******************** ******************* ****************************** **************************** **********************************	********
<직접비 소계>		*********
간접비(보험료, 안전관리비 정산 포함)		*********
<합 계>		*********

□ 계약금액 변경 내용

차수	계약금액
	당 초	변 경	증,감액
1차	*************	*************	**************
2차	*************	*************	**************
총차	***************	*************	**************

□ 건설사업관리자 검토의견

❍ 실정보고 승인 내용 및 설계변경 소위원회 심의결과 반영하고, 보험료 및        안전관리비 정산을 반영한 검토사항이 적정하다고 판단되며, 공사계약 일반        조건에 의거 설계변경 함이 적정하다고 사료됨.

4		보고자 의견

□  위 설계변경 사항은 사업계획 변경(공사구간 축소) 및 관리부서(종로구청       등) 요구사항을 반영한 내용으로 건설사업관리단이 제출한 서류와 제비율       검증확인표 등을 확인한 결과 적정하므로 설계변경 시행하고자 함.

붙임 : 1)감리단 공문 1부.

2)설계변경 내역서(총차,1차,2차) 각 1부.

3)제비율 검증확인서 1부. 끝.