문서번호	녹지관리과-3212
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	녹지관리팀장	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
이지혜	代이지혜	권종화	09/24 한정훈
협 조

재해위험수목 정비결과 보고(2차 기성)

2020. 9.

재해위험수목 정비결과보고(2차기성)

남산 및 산하공원내 재해 우려가 있는 위험수목을 정비하고자 도급사에 작업지시한 사항이 완료됨에 따라 아래와 같이 결과보고합니다.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 남산공원 식생조사 및 정비계획(녹지관리과-223호, 2019.1.18.)

지속가능한 산림 관리를 위한」남산 산림기본계획(2015.10.) 및 남산공원 식생조사 및 정비계획 수립용역(2019.5.)

□ 재해위험수목 정비계획(연간단가)(녹지관리과-37호, 2020.1.6.)

□ 제2차 기성준공계 제출(녹지관리과-3181호, 2020.9.23.)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 2020년 재해 위험수목 제거 및 정비사업(연간단가)

□ 공사기간 : 2020. 2. 6. ~ 12. 20.

□ 공사내용 : 도복 우려목, 고사목 등 재해위험수목 정비

□ 도 급 비 : *************

□ 도 급 자 : **************

Ⅲ		수 목 정 비 결 과

□ 정비기간 : '20. 8. 1. ~ 9. 21.

□ 정비대상 : 남산 및 산하공원 일대 총88개소

【 대상수목 】

‧ 순환로, 산책로 변에 위치하여 쓰러질 우려가 있는 수목

‧ 운동시설 등 이용자가 많은 시설물 주변의 위험수목

‧ 강풍 시 기울어지거나 썩은 가지가 떨어져 안전사고가 우려되는 대형 수목

‧ 고사지 전정, 수형 조절 등 정비가 필요한 수목

□ 정비결과 : ********

○ 수목제거 : ****             ○ 수목전정 : ****

‣ 작업지시 처리율 100%

Ⅳ		물량조정 및 정산

□ 물량 및 금액 (순공사비 기준)                     (단위 : 주/원)

구 분	함계금액	수목 제거		수목 전정		비 고
		수량	금 액	수량	금 액
계약분	***********	***	**********	**	**********	공정률 74%
전회기성 (1차)	**********	***	**********	***	*********
금회기성 (2차)	**********	***	**********	***	**********

※ 흉고직경별로 수량이 변경된 사항으로서 상세 증감내역은 별첨 참조

□ 물량 조정 사유

○ 당초 계약물량은 연간단가 계약체결을 위한 개략적인 발주물량으로서 위험수목 정비 결과에 따라 흉고직경에 맞춰 실물량을 정산함.

□ 기성금 지급내역 (제경비 포함)                     (단위 : 원)

구 분		도급액	누 계	전회기성 (1차)	금회기성 (2차)	비고
도급비	계	***********	***********	**********	**********
	공급 가액	***********	***********	**********	**********
	부가 가치세	**********	**********	*********	*********

※ 금회기성금액(***********) 중 노무비(8월) 기지급액(***********)을

제외한 정산금액(***********) 기성 준공

Ⅴ		보고자 의견

□ 위험수목 정비를 위하여 도급사에 금회 작업지시한 사항이 완료됨에 따라 계약물량에서 흉고직경별로 설계변경(실정산)하고 기성금을 지급하고자 하며,

□ 향후 지속적으로 위험수목을 조사하여 작업지시하고자 함.

붙임 1. 수목 정비 결과표 1부.

2. 기성내역서(2차) 1부.

3. 완료사진(용량관계로 발췌,축소) 1부.  끝.