문서번호	도로보수과-9629
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
이이용		강종훈	09/24 김영철
협 조

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제1회)

2020. 09.

서부도로사업소

(도로보수과)

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

설계변경 검토보고(제1회)

2020년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 시행 중 횡단보도확충 및 중앙버스 전용차로 흐름개선사업 등 사업예산의  배정으로 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 횡단보도 확충정비사업 예산 재배정(1~9차) : 104,320천원)

○ 중앙버스 전용차로 흐름개선사업 예산재배정(1~2차) : 79,260천원)

○ 교통사고 잦은곳 개선사업 예산 재배정(1~2차) : 36,660천원

※ 국비(18,330천원), 시비(18,330천원), 국비와 시비 구분: (50:50)

○ 자전거우선도로 시인성개선사업 예산 재배정 : 15,000천원

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2020. 3. 25. ~ 12. 31.

○ 도 급 자 : 우리피앤알(주)  대표  인창호

○ 계약금액 : 559,102,120원

공 종	규 모	비 고
노면표시 (융착식) 도색	17,405m
노면표시 (융착식) 재도색	195,863m
노면표시 (융착식) 제거	6,005m
차도밑 그림	1,198m
도로표지병 설치 및 철거	400개
교통신호수	344인

□ 설계변경 현황

○ 설계변경 금액                                        (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	740,113,730	975,353,730	증)235,240,000
도 급 비	559,102,120	754,700,000	증)195,597,880
관 급 비	181,011,610	220,653,730	증) 39,642,120

○ 물량 증․감 내역

공 종	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
노면표시 (융착식) 도색	m	17,405	35,200	증) 17,795
노면표시 (융착식) 재도색	m	195,863	221,751	증) 25,888
노면표시 (융착식) 제거	m	6,005	15,302	증) 9,297
차도밑 그림	m	1,198	18,176	증) 16,978
도로표지병 설치 및 철거	개	42	400	증) 358
교통신호수	인	344	433	증) 89

○ 설계변경 사유

- 서울시(교통운영과)에서 횡단보도 확충정비사업 및 중앙버스전용차로 흐름개선사업, 교통사고 잦은곳 개선사업, 자전거 우선도로 시인성개선사업 등 예산 재배정됨에 따라, 사업의 시급성을 감안하여 2020년 교통안전시설(노면표시)유지보수공사에 포함하여 공사시행으로 사업예산 증가

□ 예산과목

○ 횡단보도 확충정비사업 : (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전 시설물 관리, 보행불편 해소를 위한 횡단보도 확충정비, 시설비 및 부대비, 시설비(104,320천원)

○ 중앙버스전용차로 흐름개선사업 : (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선, 버스서비스이용제고, 중앙버스전용차로 흐름개선, 시설비 및 부대비, 시설비(79,260천원)

○ 교통사고 잦은곳 개선사업 : (교통사업특별회계) 도시교통실 교통운영과, 도시교통 체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리 강화, 교통사고잦은곳개선사업, 시설비 및 부대비, 시설비(36,660천원 -국.시비 50:50)

○ 자전거우선도로 시인성개선사업 : 도시교통실 자전거정책과, 자전거이용  활성화 및 교통환경개선, 자전거이용시설 확충 및 관리, 자전거도로 안전시설 확충, 부대비, 시설비(15,000천원)

□ 향후계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(제1회)을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경 내역서 1부.  끝.