문서번호	시설관리과-17021
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
강철운	권영안	09/24 김홍준

정산 보고서 (1차)

〔2020년 은평구관내 상수도공사-장기계속단가계약〕

2020. 9.

2020년 은평구 관내 상수도공사 정산보고(1차)

『2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)』의 수급인 유덕환경(주)부터 정산(1차) 요청이 있어 아래와 같이 기성(정산) 시행하고자 함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 은평구 관내 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 계약금액 : 금921,742,980원(일금구억이천일백칠십사만이천구백팔십원)

○ 계약기간 : 2020. 6. 4. ~ 2021. 6. 30.

○ 공사규모 : D=20mm ~ 300mm, L=1,736m

○ 도 급 자 : ***********

Ⅱ		정산현황

○ 정산기간 : 2020.6. 4. ~ 2020. 8. 7.

○ 정산내역

(단위: 원)

계약금액	기정산 금액	예산과목	금회기성 금액(A)	노무비 기지출액 (B)	금회지출액 (A-B)	잔액
921,742,980	0	계	195,910,000	32,659,000	***********	725,832,980
		급배수공사비 (신설공사비)	115,104,000	32,659,000	82,445,000
		수선유지교체비 (불용관정비)	304,600	-	304,600
		교체장애 수전정비	25,677,400		25,677,400
		시설비 (장기사용 배급수관정비)	54,824,000	-	54,824,000

○ 정산물량

구 분	공사개요	기성금액	비고
계		195,910,000
신 설	Φ20~300㎜, L=186m 대형계량기실 설치 1개소 보호통 설치 51개소	115,104,000	노무비포함(‘20.7~8.) 금32,659,000원
불용관	Φ13~50㎜ 새들잠금 20개소 앵글밸브 교체 13개소	304,600
교체장애 (불용관)		25,677,400
장기사용	원형변실 설치 – 5개소 철개고정장치설리 - 5개소	54,824,000

○ 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비(급수공사)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비(불용관)

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비,교체장애수전정비

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 배급수관정비)

Ⅲ		검토사항

○ 공종별 산출 적정성 여부 : 적정

○ 관련사항 적정성 여부 : 적정

○ 수량산출 적정성 여부 : 적정

Ⅳ		조치의견

○ ㈜대한콘설탄트 검토사항을 확인한바, 상기와 같이 기성내역이 타당하므로 기성처리코자 함.

붙임  1. 기성(정산)내역서(1차) 1부.

2. 기성부분 검사원(1차) 1부.

3. 노무비 기 지출내역 1부.  끝.