투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사 - 설계변경(1회) 도급비 증액

우리 과에서 추진중인 ‘잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사’에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회)을 시행하고 도급비 증액 금액에 대하여 지출품의 등록하고자 합니다.

1. 공 사 명: 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사

2. 공사기간: 2020. 3. 20. ~ 2020. 10. 30.

3. 도 급 비: (당초) 금327,383,000원 → (변경) 금475,900,000원

4. 지출품의 등록: 금93,100,000원

- 도급비 증액금액(148,517,000원) 중 기 품의등록된 낙찰차액(55,417,000원)을 제외하고 품의등록

5. 예산과목

- 한강사업본부 시설관리과, 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 노후상수관 정비, 시설비및부대비, 시설비

붙임  설계변경 시행보고 1부.  끝.

주무관							최재훈			시설관리과장					09/24 손창열
협조자
시행			시설관리과-3618									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)															/
전화		02-3780-0692						/전송			02-3780-0744					/	choijh1007@seoul.go.kr												/	부분공개(5)