문서번호	토목과-11917
결재일자	2020.9.24.
공개여부	부분공개
방침번호

주무관		도로관리팀장		토목과장		안전건설교통국장
조장호		조영두		오석관		09/24 손경철
협조
	재무과장		이경생
	계약팀장		이은술

★ ◉

『2020년 이면도로 포장 및 정비공사(단가계약)』

설계변경(제2회) 검토 보고

2020. 9.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [√] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [√] 유지비용 [√] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [√]
	● 홍 보 제 목
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

『2020년 이면도로 포장 및 정비공사(단가계약)』

설계변경(제2회) 검토 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2020년 이면도로 포장 및 정비공사(단가계약)

○ 기    간: 2020. 2. 24. ∼ 2020. 12. 31.

○ 도 급 자: 장위건설 주식회사 대표 유용수

○ 사 업 비: 금1,064,950,000천원

(도급비 630,102천원, 관급비 348,762천원, 이전비 86,086천원)

□ 설계변경 사유

○ 타 부서 협조 사업에 따른 신규공종 및 공종별 물량 증가 발생

- 2020년 그린파킹사업 추진계획(교통지도과-11165호, 2020.4.27.)

- 옥정초 인조잔디 운동장 정비 계획(교육지원과-4988호, 2020.5.20.)

○ 현장 여건에 따른 공종별 물량 증·감 발생

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사유로 공종별 변경된 사항에 대하여 첨부된 변경내역서와 같이 설계변경 및 정산 처리코자 함

○ 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감		비 고
총공사비	1,064,950,000	1,544,597,000	증	479,647,000
도 급 비	630,102,000	860,552,000	증	230,450,000
관 급 비	348,762,000	545,096,000	증	196,334,000
이 전 비	86,086,000	138,949,000	증	52,863,000

※ 예산현황 붙임 참조

붙임  1. 설계변경내역서 1부.
2. 예산현황 1부.
3. 계약금액조정 검증확인서 1부.

4. 관련공문 2부.  끝.