문서번호	도시계획과-12857
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	종합계획팀장	도시계획과장
김래연	심재욱	09/24 조남준
협 조

「도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축 감리용역」

준 공 검 사  결 과  보 고

2020. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축 감리용역」

준 공 검 사  결 과  보 고

「도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축 감리용역」사업이 완료됨에 따라 수행과제 및 산출물에 대한 검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		사업개요

○ 사 업 명 : 도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축 감리용역
○ 사업기간 : ’19.9.25. ~ ’20.9.26.

- 계약변경(’20.12.26.) : 당초 2020.6.26. ⇒ 2020.9.26.

▸준공기한 연장 : 감리대상사업 기간연장에 따른 감리기간 연장

○ 계 약 자 : ㈜가온씨엔에이

○ 계약금액 : 64,989,750천원(부가가치세 포함)

○ 사업내용 : 설계단계 및 종료단계 과업이행여부 점검

○ 사업범위 : 대상사업의 사업관리, 응용SW 개발, DB, 보안 등

	< 감리대상 사업개요 >
≫ 사 업 명 : 도시계획정보시스템 웹기반 업무포털 2단계 구축 ≫ 사업기간 : ‘19. 6. 27. ~ ’20. 9. 26. ≫ 사 업 비 : 895,430천원 ≫ 주요 사업내용 · 도시계획정보시스템 업무포털 기능 고도화 · 도시계획포털 개선 및 고도화 · 국토교통부 UPIS 연계 및 개발행위 인허가시스템 도입 등

2		감리수행

□ 감리기간 및 구성

구 분		설계단계 감리	종료단계 감리
감리기간	감리	‘19.11.18.~11.22.	‘20.6.8.~6.12.
	조치감리	‘20.1.2.	‘20.9.16.
감리인 구성		배형문 외 4명	배형문 외 5명

□ 감리결과

감 리 영 역	개선권고사항(건수)		조치내역 확인결과
	설계단계	종료단계
1. 사업관리 및 품질보증활동	2건	2건	적정
2. 응용시스템	2건	3건	적정
3. 데이터베이스	3건	3건	적정
4. 시스템구조 및 보안	1건	2건	적정

※ 감리 주요지적사항에 대한 처리내역 : (붙임)참조

□ 과업이행여부 시정조치확인 결과 점검제외대상 : 5건

○ 개발행위허가 서비스에 대한 운영 최적화 : 서비스도입 검토중

요구사항ID	요구사항명	요구사항 상세설명
ECR-003	국토교통부 UPIS 표준시스템 도입 설치	표준시스템 주요서비스 중 서울시 활용예정인 개발행위허가 서비스에 대한 운영 최적화

○ 산출물 작성 및 제출 등 4건 : 처리완료

3		준공검사결과

○ 준공 검수일 : 2020. 9. 23.(수)

○ 검 사 방 법 : 제안서, 과업지시서 기반의 검사기준에 따라 검사

○ 준공검사결과 : 적합

○ 준공대상 산출물 제출목록

산출물 종류	제출수량			비고
	계	발주기관	사업자
사업수행계획서	1부	1부
감리계획서	2부	1부	1부
감리보고서	4부	2부	2부	제본
	2부	2부		CD
감리 업무일지	1부	1부
시정조치확인보고서	4부	2부	2부	제본

4		사업비 집행내용

○ 계약 및 집행

구 분	세 부 집 행 내 역		비 고
	일 자	금 액(원)
계약체결	’19. 9. 20.	64,789,750
선금지급	’19. 10. 1.	32,449,370	계약금의 50%
계약변경	’20. 6. 19.	-	(기간연장) ’20.6.26 -> ‘20.9.26
준공지급(잔액)	’20. 9. 24.	32,449,380

○ 예산과목 : 도시계획의 발전기반 제고, 도시발전연구, 도시계획정보

시스템 웹기반 업무포털 구축, 전산개발비(100-207-02)

붙임 : 감리 주요 지적사항 및 조치사항 1부.  끝.

[ 붙임 ]

감리 주요 지적사항에 대한 조치내역

감리영역	주요 개선 권고사항		조치 확인
사업관리 및 품질보증 활동	설계단계	(1) 요구사항추적표, 검사기준서 일관성 확보 및 일부 미흡한 부분에 대한 보완 필요	적정
		(2) 대민시스템 일정 변경에 따른 WBS 보완, 일부 미 수행한 설계단계 품질점검 완료 필요	적정
	종료단계	현장감리 후 잔여기간(약 2주) 대비 진행중인 요구사항이 다수 식별되어, 사업 기간내 완료 가능 여부를 발주기관에 보고 필요	적정
		진행 중인 잔여과업 완료 후 관련 산출물을 보완하고, 품질점검 수행으로 품질 수준 향상 필요	적정
응용 시스템	설계단계	(1) 기능 요구사항이 과업에서 설계까지 추적과 변경 요구사항의 근거 확보가 요구되며 진행이 미진한 과업의 조속한 협의 진행 필요	적정
		(2) 요구사항의 완전한 설계 반영을 위해 사용자화면정의서 최신화와 체계적 구축 및 활용을 위해 산출물 보완이 필요	적정
	종료단계	(1) 업무시스템 기능 요구사항의 과업 이행여부 점검결과 발견된 개선 사항의 보완 필요	적정
		(2) 대민시스템 기능 구현의 충분성과 완전성을 강화하고, 사용자의 편의성을 확보하기 위한 기능 보완 필요	적정
		(3) 시스템 구축 후 원활한 운영과 유지보수를 위하여 구축 산출물의 보완 필요	적정
데이터 베이스	설계단계	(1) 데이터 요구사항을 기준으로 수행 내용을 점검한 결과, 작업활동이 적정하게 진행 중이며 일부 산출물에 대하여 현행화 필요	적정
		(2) 속성 테이블의 정합성 검사 결과에 대하여 데이터 무결성 유지를 위한 개선 권고	적정
		(3) 데이터 전환 및 검수 관련 DB전환 계획서의 일부 미흡사항에 대한 보완 필요	적정
	종료단계	(1) 데이터베이스에 구현하여 사용중인 일부 인덱스, 오브젝트에 대한 목록 관리와 암복호화 정보선정 산출물 보완 필요	적정
		(2) 데이터베이스 테이블의 정합성 오류에 대한 데이터 무결성 유지 필요	적정
		(3) 일부 남은 전환 대상의 전환 완료와 전환과정에서 추가 생성한 테이블을 설계서에 반영하는 것이 필요	적정
시스템구조 및 보안	설계단계	(1) 목표시스템의 효율적인 유지보수를 위한 아키텍처 설계서의 보완이 필요	적정
	종료단계	(1) 시스템 장비 도입 및 설치에 따른 설치확인서와 시스템 작업계획서의 일부 보완이 필요	적정
		(2) 시스템의 효율적인 운영을 위한 운영자지침서의 보완이 필요	적정