투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	설계변경(총차 10회, 6차 3회) 시행 및 변경계약 의뢰(신상도 지하차도 확장공사)

우리 부에서 시행 중인「신상도 지하차도 확장공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 10회, 6차 3회) 계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 신상도 지하차도 확장공사

2. 계약금액 : 12,064,514,000원(6차 2,452,990,000원)

3. 공사기간 : 2007.12.31.~2021.6.30.(6차 2018.12.15. ~ 2020.9.30.)

4. 계 약 자 : (유)한백종합건설 외 1개사(대표 이진일)

5. 설계변경 내역(※ 공사기간 변경 없음)

구 분		당 초	변 경	증·감
계약금액	총차	12,064,514,000원	13,458,300,000원	증 1,393,786,000원
	6차	2,452,990,000원	2,452,990,000원	변경 없음

- 변경사유 : 기 승인한 실정보고, 산업안전보건관리비 산출공식의 관급자재비 누락분, 설계변경 소위원회 자문의견 반영

6. 예산과목 : 안전총괄실 도로계획과, 도로 건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 신상도 지하차도 확장, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	이시연		방재시설과장	김태중		방재시설부장	09/24 代김태중
협조자
시행	방재시설부-13450	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8764	/전송	02-3708-8756	/	siyeon0907@seoul.go.kr	/	부분공개(5)