투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	공사 변경계약 의뢰(잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사)

우리 과에서 추진중인 ‘잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사’에 대하여 다음과 같이 설계변경(1회)을 시행하고 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 잠원 한강공원 노후 상수관 정비공사

2. 공사기간: 2020. 3. 20. ~ 2020. 10. 30.

3. 도 급 자: **************

4. 도 급 비: 금327,383,000원

5. 설계변경 내용: 공종별 물량 증감 및 신규공종 반영, 낙찰차액 사용

구 분	당 초(원)	변 경(원)	증 감(원)	비 고
총공사비	644,583,000	700,000,000	증) 55,417,000
도급비	327,383,000	475,900,000	증) 148,517,000
관급자재비	127,960,000	163,100,000	증) 35,140,000
이전비	189,240,000	61,000,000	감) 128,240,000

6. 변경계약 의뢰

- 도 급 비: (당초) 금327,383,000원 → (변경) 금475,900,000원

7. 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설 관리 및 개선, 노후상수관 정비,

시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 시행보고 1부.

2. 변경설계서(1회) 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	최재훈		시설관리과장	09/24 손창열
협조자
시행	시설관리과-3614	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0692	/전송	02-3780-0744	/	choijh1007@seoul.go.kr	/	부분공개(5)