문서번호	방재시설부-13447
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이시연		김태중	09/24 代김태중
협 조
	주무관			김상용

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(1차 3회) 및 1차 준공기한 연기 검토보고

2020.9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」

설계변경(1차 3회) 및 1차 준공기한 연기 검토보고

「신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역」의 설계변경(1차 3회) 및 1차 용역 준공기한 연기에 대하여 검토 보고드림.

※ 관련공문: 신상도감 2020-188호(2020.9.21.)

Ⅰ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 신상도 지하차도 확장공사 건설폐기물 처리용역

❍ 규    모 : 건설폐기물 운반 및 처리

❍ 용역기간 : `19.4.1.~`20.12.31.(1차  `19.4.1.~`20.9.30.)

❍ 용 역 비 : 432,715,000원(1차 178,728,000원)

❍ 용 역 사 : ㈜삼양이앤디 외 1개사

Ⅱ		보고 내용

▢ 설계변경(1차 3회) 검토

❍ 변경사유 : 공사여건 변동에 따른 총차 물량 내 1차 물량 조정

❍ 변경사항

구 분		당 초	변 경	증·감
용 역 비		178,728,000원	209,374,000원	30,646,000원
용역 규모	폐콘크리트	2,081톤	3,079.66톤	998.66톤
	폐아스콘	1,144.68톤	1,144.68톤	-
	건설폐재류	1,479.49톤	1,479.49톤	-
	혼합폐기물	199.25톤	199.25톤	-

※ 총차 용역비 및 규모는 변경 없음

▢ 준공기한 연기 검토

❍ 연기사유 : 6차 공사가 `20.9.30. 준공 예정으로 원활한 공사 추진을 위하여 폐기물 처리용역(1차)의 준공기한 연기 필요

❍ 변경사항

구 분	당 초	변 경	증·감
총차	2019.4.1.~2020.12.31.	2019.4.1.~2020.12.31.	변경 없음
1차	2019.4.1.~ 2020.9.30.	2019.4.1.~ 2020.10.31.	31일

▢ 책임건설사업관리기술자 검토의견

❍ 공사여건이 변동됨에 따라 총차 물량 내 1차 물량을 조정(폐콘크리트 물량 증가)하여 설계변경(1차 3회)하고

❍ 6차 공사가 `20.9.30. 준공 예정임에 따라 원활한 공사 추진을 위하여 1차 용역의 준공기한을 연기함이 타당하다고 사료됨

Ⅲ		보고자 의견 및 조치계획

❍ 책임건설사업관리기술자의 검토의견이 적정하다고 판단되는 바, 설계변경 시행 및 계약부서에 변경계약 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.