코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	설계변경 및 변경계약 요청 - 청과시장입구교차로 교통안전시설물 설치공사

우리 부서에서 시행중인 「청과시장입구교차로 교통안전시설물 설치공사」와 관련하여 아래와 같이 설계변경 및 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

○ 계약건명 : 청과시장입구교차로 교통안전시설물 설치공사

(계약번호 2020080CD19-00)

○ 계약일자 : 2020. 08. 28.

○ 준공기한 : 2020. 09. 30.

○ 계약상대자 : *******

나. 설계변경 및 준공기한 연기 내역

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비고
*****	**********	**********	************
****	*************************	*************************	***********

다. 설계변경 및 준공기한 연기 사유

○ 시공현장 확인 결과 일부구간의 기존 관로 재사용 등 시공물량 변경 및 도로

굴착복구비(시공사 납부) 원가 반영

○ 한전수용신청 승인 및 도로굴착 및 점용허가 승인 등 행정절차 지연에

따른 절대공기 부족

라. 예산과목

○ 재해 및 재난예방, 재난예방 및 복구, 재난관리기금 재난계정, 재난예방

(재난관리기금 재난계정), 시설비

붙임 : 1. 관련 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 준공기한연기 의뢰서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

							교량안전과장
주무관							이회진			강남일반교량팀장					조성만					교량안전과장					09/24 하현석
협조자				계약1팀장						원종순
시행			교량안전과-14227									(						)		접수											(						)
우	04515					서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층															/
전화		02-2133-1972						/전송			02-2133-1429					/													/	부분공개(5 6)