코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서초구청장(가로행정과장)
(경유)
제목	도시계획시설(하수도)사업 실시계획(변경) 작성고시에 따른 보상추진 요청

1. 물재생계획과-11286(2020.8.26.)와 관련입니다.

2. 강남역 일대 침수해소를 위한 사업의 일환으로 추진중에 있는 반포천유역분리터널 사업에 대하여 도시계획사업 추진을 위한 실시계획(변경)인가 고시를 완료하였기에 통보하오니 관련법에 따라 보상 추진하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 주요 변경사항

구 분	변 경 사 항
	당 초	변 경
사업기간	고시일로부터 ~ 2021년 1월 31일	고시일로부터 ~ 2022년 3월 31일
사업규모	- 규 모 : ▣4.5m×4.5m ~ D=6,500mm, L=1,284m - 면 적 : 9,646.44㎡	- 규 모 : ▣4.5m×4.5m ~ D=7,100mm, L=1,284m - 면 적 : 10,566.9㎡

붙임 : 가) 공문 1부.

나) 실시계획인가고시(시보게재) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김병오		하수계획팀장	정한영		물재생계획과장	09/24 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-12538	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	2133-3792	/전송		/		/	대시민공개