	동부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	설계변경(제2회) 시행 및 변경계약 의뢰(2020년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사)

1. 도로보수과-9457(2020.09.24.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『2020년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제2회) 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 2020년 관내 포장도로 불량맨홀 정비공사(연간단가)

나. 도 급 자: **************

다. 공사기간: 2020. 4. 23. ~ 2020. 12. 20.

라. 설계변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비고
총 공 사 비		**************	**************	**************
도급비	공급가액	**************	**************	***************
	부가가치세	************	************	*************
	계	**************	**************	**************

마. 변경사유: 신규공종 발생에 따른 기 계약공종 물량 조정 및 낙찰차액 사용

바. 예산과목

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)(금699,541,560원)

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)(금172,724,000원) 증227,276,000원

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구(도로굴착복구기금), 도로굴착복구공사, 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)(금259,086,000원)

붙임  1. 설계변경(제2회) 시행 방침서 1부.

2. 설계변경(제2회) 사유서 1부.

3. 설계변경(제2회) 내역서 1부.

4. 합의각서(제2회) 1부.  끝.

	도로보수과장
주무관	이석연		주무관	송광석		도로보수과장	09/24 양기승
협조자	주무관	장인숙
시행	도로보수과-9459	(		)	접수		(		)
우	06332	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0344	/전송		/	wartry@seoul.go.kr	/	부분공개(5)