문서번호	설비부-14629
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
김수진	이종근	09/25 이달영

『동부간선도로(3공구) 영상감시장치』

설계변경(정산) 검토 보고

2020. 9.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『동부간선도로(3공구) 영상감시장치』

설계변경(정산) 검토 보고

『동부간선도로(3공구) 확장 통신공사』와 관련하여 건설사업관리기술단으로부터 제출된 관급자재(영상감시장치) 설계변경(정산)에 대하여 검토하고 보고 드림

1		공사현황

❍ 공 사 명: 동부간선도로 확장 통신공사(영상감시장치 구매)

❍ 공사위치: 상계주공 16단지 ~ 의정부 시계

❍ 공사규모: 도로확장 4→6차로, 연장 2.25km

❍ 납품기간: 2019.12.11. ~ 2020.12.31.

❍ 계약금액: 50,686천원

❍ 계약상대자: 이노뎁(주)

❍ 건설사업관리단: 동부엔지니어링(주) 외 1개사

2		검토내용

관련근거

❍ 설계변경 요청 검토보고[동삼감 제2020-279호(`20.9.23.)]

설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 1차수 준공에 따른 제경비 정산(건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양료 등)

❍ 변경금액                                                    [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)	비고
총 차	329,000,000	328,606,000	- 394,000
1 차	50,686,000	505,292,000	- 394,000

❍ 세부 정산내용                                                [단위: 원]

구 분	당 초	변 경	증, 감(-)
산재보험료	167,759	167,759
고용보험료	38,920	38,920
국민건강보험료	144,496	-	- 144,496
국민연금보험료	201,310	-	- 201,310
노인장기요양보험료	12,297	-	- 12,297
계	564,782	206,679	- 358,103
부가가치세	56,478	20,667	- 35,810
합 계	621,260	227,347	- 393,913

건설사업관리기술자 검토의견

❍ 영상감시장치 구매 계약의 보험료 정산에 따른 변경설계서를 검토한 결과 계약금액 조정은 적정하다고 판단됨.

3		보고자 의견

❍ 각종 보험료 등을 정산 반영하기 위한 건설관리사업 기술자의 검토보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 계약부서(총무부)에 설계변경(정산)을 의뢰 하고자 함

붙 임: 건설사업관리단 공문 1부.  끝.