문서번호	한양도성도감-9805
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장
최광호	이원재	09/25 안중호
협 조

한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매 납품기한 연장 검토보고

2020. 9.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매 납품기한 연장 검토보고

「한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매설치」사업 실정보고 승인(한양도성도감-9740)과 관련하여 납품기한 연장에 대하여 처리하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 사 업 명 : 한양도성 통합관제망구축(4차) 관급자재 구매

□ 위    치 : 서울시 종로구 삼청동 산2-1

□ 납품내용

○ 보안 및 바이러스 보호 소프트웨어 1조

□ 계약개요

○ 계 약 자 : 주식회사 휴네시온

○ 계약금액 : 58,614,820원

○ 납품기간 : 2020. 9. 26.

Ⅱ		설계변경 내용

□ 관련근거

○ 공사계약 일반조건 제19조(설계의 변경) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 서울특별시 공사계약 특수조건 제12·14조(설계변경 등)

□ 실정보고 내용

구 분	내 용	금 액	검토결과
납품 기한 연장	한양도성 통합관제망 구축 4차 공사 완공이 9월 30일로 예정되어 공사 완료후 납품 되어야할 보안장비 이기 때문에 납품 연장 요청	연장요청 기한을 2020. 9. 26. 에서 2020. 10. 30. 로 변경 요청	적절

□ 납품기한 변경내역

구 분	당 초	변 경	비 고
납품기한	2020. 9. 26.	2020. 10. 30.	증)34일

Ⅲ		처리의견

□  공사 완공 후 납품되어야할 보안장비이기에 공사 완공 일정에 맞추어 납품 기한 연장(증 34일)하고자 함

붙임  1. 설계변경 검토보고(공문) 1부.

2. 실정보고 공문(휴네시온)  끝.